문서번호	경제정책과-7174
결재일자	2017.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	바이오산업팀장	산업거점조성반장		경제기획관
정상진	김남욱	김선수		08/07 박대우
협 조

서울바이오허브(신관,별관)

특수실험실 구축 추진계획

2017. 8.

경제진흥본부

〔산업거점조성반〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

서울바이오허브(신관,별관)

특수실험실 구축 추진계획

유망 기술을 보유한 스타트업 기업이 이용할 수 있는 최적의 바이오기술 인큐베이팅시스템 조성을 위한 특수실험실을 구축하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

❍ 홍릉 바이오의료 R&D 클러스터 조성 추진계획(’15. 5. 행정1부시장 방침)

❍ (가칭)홍릉 바이오의료 R&D 앵커 조성․운영 계획(‘15.11.)

□ 추진 필요성

❍ 초기 창업에 필요한 연구설비시스템 지원으로 창업생태계 활성화 필요

❍ 기술중심 벤처기업의 시험․분석 연구설비 활용에 대한 수요 증가

❍ 인근 유관기관, 병원과의 연구장비 활용 연계할 수 있는 시스템 구축       - 홍릉일대, 고가․유휴 저활용 장비를 활용 할 수 있는 가변형 공간구축

□ 추진경위

❍ (가칭)홍릉 바이오의료 R&D 앵커 조성․운영 계획 수립 : ‘15. 11월

❍ 홍릉 바이오의료 R&D 앵커 조성 변경 계획 수립 :         ‘16. 7월

❍ Lab시스템 구축을 위한 자문회의 :           ‘16.11 ~ ’17. 2월

- 바이오의료 전문가, (예비)창업가, 산․학․연․병 관계자

❍ 신관․별관 기본 및 실시설계 :            ‘16.11 ~ ‘17. 7월

❍ 신관, 별관 공사착공 :                              ‘17. 8월

Ⅱ		사업개요

□ 용역개요

❍ 과 업 명 : 서울바이오허브(신관,별관) 특수실험실 기본 및 실시설계

❍ 용역방법 및 범위 : 신관․별관 통합설계

구 분	범 위	비 고
신관(380.73㎡)	지상1 층 : 바이오이미징실(44.04㎡) 지상2,3층 : 세포배양실(113.94㎡), 콜드룸(59.16㎡) 지상4,5층 : 샘플제작실(163.59㎡)
별관(168.64㎡)	지상 3, 4층 : 세포배양실(128.64㎡), 콜드룸(40㎡)

❍ 과업의 주요내용

- 특수실험실에 대한 룸데이터시트 작성(장비 및 비품목록 포함)

- 각실 ZONNING에 맞춘 설비시스템 구축(습식공조기, 의료가스 구축 등)

- 실험실 배출 폐수 및 약품처리 시설 구축

- 공사 시방서 및 내역서 작성 등 특수실험실 유지관리 지침서 작성

❍ 용역기간 : 착수일로부터 60일

❍ 소요예산 : 16백만원

❍ 예산과목 : 희망경제 정책수립․운영, 기업활동 지원체계 구축, 홍릉바이오의료 앵커조성 및 운영, 시설비(401-01)

❍ 시행방법

- 계약방법 : 수의계약

- 근    거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조제5호(추정가격이 5천만원이하의 소액용역사업으로 유사한                        사업을 시행한 경험이 풍부하고 조성사업 이해도가 높은 업체)

□ 공사개요

❍ 사 업 명 : 서울바이오허브(신관,별관) 특수실험실 조성공사

❍ 공사방범 및 범위 : 동별 별도발주시행(동별 개관시기 상이)

구 분	범 위	비 고
신관(380.73㎡)	지상1 층 : 바이오이미징실(44.04㎡) 지상2,3층 : 세포배양실(113.94㎡), 콜드룸(59.16㎡) 지상4,5층 : 샘플제작실(163.59㎡)	‘18.1월 개관
별관(168.64㎡)	지상 3, 4층 : 세포배양실(128.64㎡), 콜드룸(40㎡)	‘18.8월 개관

❍ 공사기간 : 착공일부터 70일

❍ 소요예산 : 1,750백만원

❍ 예산과목 : 희망경제 정책수립․운영, 기업활동 지원체계 구축, 홍릉바이오의료 앵커조성 및 운영, 시설비(401-01)

❍ 조성공사 주요내용

- 실험실 차단 및 독립적인 공기조화 시스템 구축

- 차단구역 환경상태(온도, 습도, 차압 등) 모니터링 및 자동제어 구축

- 통신시스템 등 보안시설 구축

- 실험실 배출 폐수 및 약품처리 시설 구축 등

❍ 시행방법

- 계약방법 : 제한경쟁계약(지역, 동일실적)

- 근    거 : 지방계약법시행령 제20조

(동일실적, 기술보유상황 등 일정한 기준을 의하여 제한                함으로써 불성실하고 능력이 부족한 업체에 대해 입찰                참가 자격 제한)

Ⅲ		향후일정

□ 추진일정

❍ 기술용역심사(타당성심사) 의뢰(기술심사담당관) :   ‘17.  8월

❍ 기본 및 실시설계 계약의뢰(재무과) :               ‘17.  8월

❍ 공사 발주 및 시행 :                     ‘17.11.~’18. 1월

□ 조성 공정계획

구 분	‘17. 8	‘17. 9 ~ 10	‘17. 11	12	‘18. 1월
사전단계
	발 주	(용역시행방침 – 기술용역심사 - 수의계약)
용역단계
	용 역 수 행		계약 – 착수보고 – 기본설계 – 자문회의 – 실시설계 – 자문회의 - 용역준공
공사시행
			공 사 시 행

끝.