문서번호	홍보과-7006
결재일자	2017.8.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		홍보과장	경영관리부장
오미영		서재식	08/28 정진일
협조

아리수! 안전식품 ‘ISO22000 국제인증’ 획득

수도박물관 견학안내 콘텐츠 제작 중간 보고(2차)

2017. 8.

상수도사업본부

홍    보    과

수도박물관 견학안내 콘텐츠 제작 중간 보고(2차)

□ 추진개요

❍ 제작내용 : 수도박물관 견학 장소에 대한 동영상 등의 안내 콘텐츠를 제작

❍ 추진기간 : ‘17. 5월 ~ 8월

❍ 제작업체 : ㈜초아커뮤니케이션

❍ 소요예산 : 9,900천원

❍ 제작편수 : 수도박물관 주요 장소별로 30편 제작

- 본관, 물환경전시관, 별관, 야외공간, 완속여과지 등

※ 당초 계획은 31편이었으나 야외 공간 콘텐츠 중 생태연못 콘텐츠 중 가재 부분이 주관부서에서 제외하기로 결정함에 따라 해당 부분에 대한 콘텐츠는 산천어 부분을 보강 촬영하기로 합의

□ 추진 경위 및 향후 일정

❍ 콘텐츠 기획 : ‘17. 5. 17. ~ 6. 5.

- 콘텐츠 제작 장소별 원고 검토 및 촬영 콘티 기획 협의

❍ 사진 및 영상 촬영 : ‘17. 6. 7. ~ 6. 29.

- 수도박물관 내외부 영상 및 기타 설명 자료 촬영

❍ 콘텐츠 촬영 편집 및 보강 촬영 : ‘17. 6. 30. ~ 8. 11.

- 당초 7월에 완료하려 하였으나, 야외 촬영 부분이 우천 등의 기상 상황으로 인하여 연기되고, 친환경녹색정수장 등 야외촬영 공간 일부가 공사중인 관계로 불가피하게 촬영 기간이 길어짐.

❍ 최종 영상 검토 및 검수 : ‘17. 8. 14. ~ 9. 16.

- 최종영상 : 총 30편 중 29편 제작 완료

※첨부 용량 제한으로 일부 영상만 첨부

-> 모바일견학안내시스템 사업자 선정 완료되어 수도박물관 완성 영상을 토대로 비콘시스템 시범 테스트하여 최종 영상 파일형식 및 용량 등 범위 결정 완료. 이를 토대로 아리수 정수센터 콘텐츠 제작 예정.

□ 검토 사항

❍ 산천어 촬영 부분 제작 연장 검토

- 수도박물관 야외 코스 중 일부가 공사 진행중이어서 완료후 추후 촬영 예정

❍ 연장사유 및 협의사항

- 수도박물관 콘텐츠 제작관련 촬영 장소 중 친환경 녹색 정수장(뚝도)건립이 늦어져 산천어 촬영이 제작 기간내에 불가능하여 일부 촬영에 대하여 검수 후 보강 촬영 검토 및 합의 각서 등 체결 예정.

- 해당 장소 완공이 많이 늦어질 경우 해당 부분만 제외하고 대가 지급 검토

끝.