문서번호	시설과-3059
결재일자	2017.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
최종성	장창원	진병규		09/29 이용태
협 조
	교육사업지원팀장		윤정호
	주무관		강희진
	주무관		김영균
	주무관		김정중

「2017 지방 폐교 활용」

가족자연체험시설 조성공사 시행계획

2017. 09.

동부공원녹지사업소

(시     설     과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□	장애인편의시설 반영
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	지방폐교활용
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□	보도자료제출 등 (사업주관부서)
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

「2017 지방 폐교 활용」

가족자연체험시설 조성공사 시행계획

지방폐교를 활용한 가족자연체험시설을 조성 하여 시민들에게 자연을 통한 휴식과 체험의 공간을 제공하고자「2017 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사」를 다음과 같이 시행하고자 함.

※ 추진근거 : 2017 지방 폐교활용 가족자연체험시설 조성공사 시행요청(교육정책과-8992 :‘17.06.29)

Ⅰ		사업개요

사 업 명 : 2017 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사(봉화 황평분교)

공사기간 : 2017. 10. ~ 12.

사 업 비 : 496,000천원

공사개요

▸ 대지위치 : 경상북도 봉화군 소천면 홍점길 31

▸ 사업규모

대지면적	건축/기계(리모델링)	조경(캠핑장 조성)	전기
18,049㎡	본관동 리모델링 (지상1층 바닥면적 510㎡), 취사․세척장,샤워실(온수설비)설치 등	부지조성, 데크, 포장, 안내사인 등	CCTV, 보안등 등

추진경위

▸ 2017. 3.  8 : 지방폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성계획 수립(교육정책과)

▸ 2017. 6. 20 : 건축물 구조안전진단 용역준공(교육정책과)

▸ 2017. 6. 29 : 2017지방폐교활용 가족체험시설 조성공사 시행 요청

(교육정책과→동부공원녹지사업소)

▸ 2017. 7.  3 : 예산재배정 요청(동부공원녹지사업소→교육정책과)

▸ 2017. 7.  6 : 황평분교 합동 현장조사

(교육정책과, 동부공원녹지사업소, 봉화군청, 봉화교육지원청)

▸ 2017. 7. 17 : 기술용역 타당성심사 결과 통보(적정)

▸ 2017. 7. 26 : 실시설계 계약 및 착수

▸ 2017. 7. 27 : 황평분교 현장조사

(동부공원녹지사업소, 봉화군청, 봉화교육지원청, 설계사)

▸ 2017. 8. 17 : 봉화군청 계획안 협의(교육정책과, 동부공원녹지사업소, 설계자)

▸ 2017. 9. 6~7 : 황평분교 설계도면 현장 검토

▸ 2017. 9.  8 : 설계 검토회의(교육정책과, 동부공원녹지사업소, 설계자)

▸ 2017. 9. 13 : 실시설계용역 준공

▸ 2017. 9. 21 : 봉화군청 협의(교육정책과, 동부공원녹지사업소)

Ⅱ		예산조치

(단위:원)

총 계	총 공 사 비			비 고
	건축/기계	조경	전기
469,099,990	229,201,910	83,999,080	155,899,000	관급자재 포함

예산과목 : 교육정책담당관, 학교지원 및 우수인재양성, 학교교육지원, 폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성운영, 시설비및부대비, 시설비

Ⅲ		공사발주계획

입찰방법

[건축] 제한경쟁입찰(지역-경상북도) / 주계약자 공동도급

▸ 제한경쟁 : 사업대상지가 경상북도에 위치한 사업으로 인력 및 장비 등의 수급을 원활히 하여 공사의 품질과 안전확보

▸ 주계약자 공동도급 : 추정가격 2억이상 100억미만

※「서울시 건설업혁신 3不대책」; 도기본 건설총괄부(‘16.10.23)

[전기] 제한경쟁입찰(지역-경상북도)

▸ 제한경쟁 : 사업대상지가 경상북도에 위치한 사업으로 인력 및 장비 등의 수급을 원활히 하여 공사의 품질과 안전확보

발주금액

<단위:원>

구 분	계	도 급 비			관 급 자 재 비
		소계	공급가액	부가가치세
건축/조경	313,200,990	286,383,500	260,348,637	26,034,863	26,817,490
전 기	155,899,000	114,607,000	104,189,000	10,418,000	41,292,000

공사기간 : 착공일로부터 50일

설계도서 열람

▸ 조달청 국가종합전자조달시스템(www.g2b.go.kr)에 게재된「2017년 지방폐교활용 가족자연체험시설 조성공사(봉화 황평분교)」입찰자료 열람

입찰참가자의 자격

[건축]

▸ 입찰참가자는 건설산업기본법 제9조에 따른 다음 자격을 보유한 자로서 주계약자 관리방식에 의한 공동수급체를 구성하여 입찰에 참가하여야 함

∘ 주계약자 : 건축공사업(토목건축공사업 허용)

∘ 부계약자 : 전문공사를 시공하는 업종 중 조경시설업을 등록한 업체

▸ 입찰참가자(주․부계약자 모두 해당)는 입찰공고일 전일부터(낙찰자는 계약체결일 까지) 주된 영업소가 경상북도에 소재한 업체이어야 함

▸ 시공비율

구 분	계	건축(기계포함)	조경
추정금액	286,383,500	230,118,098	56,265,402
시공비율	100%	80.35%	19.65%

[전기]

▸ 입찰참가자는 전기공사업법 제4조에 따른 전기공사업 면허 소지자로서, 입찰공고일 전일부터(낙찰자는 계약체결일 까지) 주된 영업소가 경상북도에 소재한 업체이어야 함

현장설명 : 미실시(지방계약법시행령 제15조제3항)

낙찰자 결정방법 : 시설공사 적격심사

하자보증기간

▸ 지방계약법 시행규칙 제68조 및 동 시행규칙 별표1(공사의 공종별 담보책임의

존속기간)에 따름

Ⅳ		감독지정

건 축	조 경	전 기	기 계
김영균(건축7급)	최종성(임기녹지8급)	강희진(전기6급)	김정중(기계7급)

Ⅴ		향후계획

2017. 09. 29 : 공사발주(계약) 의뢰(재무과)

2017. 10. 27 : 공사계약

2017. 10. ~ 12 : 공사시행 및 준공