아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	한밭조경 대표 박종업 귀하, ㈜그린동현 대표 최승용 귀하
(경유)
제목	소방행정타운 119극기훈련시설 설치공사 계약이행 재요청

1. 관련근거

가.  지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제88호,

2017.4.11.) 제5절 공사계약의 이행

나. 재무과-40440(2017.08.11.)호 “계약체결 통보(119극기훈련시설 설치공사)”

다. 소방행정과-23278(2017.09.05.)호 “소방행정타운 119극기훈련시설 설치공사 계약이행 요청”

2. 귀 업체와 계약한 119극기훈련시설 설치공사가 2017.8.14. 착공한 이후 현재까지 가시적으로 진행된 공사가 없어서 재 요청하오니 계약기간내 공사가 완료될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명  : 소방행정타운 119극기훈련시설 설치공사

나. 공사기간 : 2017.08.14. ~ 2017.12.11.(120일간)

다. 계 약 자  : ① 한밭조경 (대표 박종업, ☏042-527-1443)

- 대전광역시 유성구 원내로 38, 4층

② 주식회사 (대표 최승용, ☏02-571-4800)

- 서울시 서초구 양재동 339-3

라. 현장대리인 : 김혜경 조경기사

마. 요청사항 : 공사계약 이행

※ 공사공정예정표 서울시(소방행정과)로 제출 요청함

붙임  1. 공사계약서 1부.

2. 공사설계설명서(시방서) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★담당자	곽민규		단장	박정경		소방행정과장	10/11 김선영
협조자
시행	소방행정과-26123	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1393	/전송	02-3706-1329	/	119mk2@seoul.go.kr	/	부분공개(7)