문서번호	총무과-17000
결재일자	2017.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	총무부장		한강사업본부장
남궁환	박병현	박기용		10/13 유재룡
협 조

뚝섬안내센터 리모델링

공사발주 시행계획

2017. 10.

한강사업본부

(총  무  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

뚝섬안내센터 리모델링

공사발주 시행계획

우리 본부에서 시행하고 있는「뚝섬안내센터 리모델링 공사」시행계획을 수립하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업개요

○ 사업위치 : 한강공원 뚝섬안내센터(광진구 자양동 704-1)

○ 규    모 : 지하1층 지상 3층 연면적 684.93㎡

○ 공사종별 : 리모델링 및 내진보강

○ 총공사비 : 880,000천원

○ 공사기간 : ’17.10. ~ ’18. 4. (착공일로부터 180일)

Ⅱ		추진경위

○ 2017. 6. 22  뚝섬안내센터 제로에너지건축 사업계획(녹색에너지과)

○ 2017. 8. 30  내진성능 보강 설계

○ 2017. 9. 14  계약심사 요청(녹색에너지과→계약심사과)

○ 2017.10. 10   계약심사 결과 통보(녹색에너지과→한강사업본부)

Ⅲ		공사 시행계획

□ 분야별 공사비 현황                          (단위 : 천원)

구 분	총 공 사 비			비 고
	계	도급비	관급비
건축공사	656,285	656,285	-	통합발주
기계공사	66,134	29,883	36,251
전기공사	67,195	21,955	45,240	별도발주
통신공사	90,097	90,097	-	별도발주
계	879,711	798,220	81,491

□ 주요 공사내용

분 야	공 사 내 용	비 고
건 축	삼중유리 PVC 시스템 창호 설치 벽체·천장 내·외부 단열공사 내진보강공사(기둥 10개소 단면 증타)
기 계	전열교환기 설치 냉·난방기기 교체
전 기	신재생에너지 설치(태양광 12㎾ 추가) LED 전등으로 교체
통 신	모니터링 시스템 및 통신공사

□ 입찰 및 계약방법

○ 건축(기계 포함) 공사 시행계획

- 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 입찰참가자격 : 건설산업기본법 제8조, 시행령 제7조 규정에 의한 종합건설업 중 건축공사업(또는 토목건축공사업) 면허를 등록한 업체(주계약자)와 전문건설업종 중 기계설비공사업(부계약자)가 주계약자 관리방식에 의한 2개사 이내의 공동수급체를 구성하고 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 서울특별시에 소재한 업체

- 현장설명 : 미실시(설계도서 열람으로 갈음)

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제15조제3항

- 낙찰자 결정방법 :「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제2장 시설공사 적격심사 세부기준(행정자치부 예규 제87호, 2017.4.17)

- 공사기간 : 착공일로부터 180일

- 하자보증기간 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제68조 및 시행규칙 별표1(공사의 공종별 담보책임의 존속기간)에 의함.

○ 전기 및 통신공사 시행계획

구 분			소요금액(원)	계약방법
전기공사	도 급 비		21,955,000	수의계약
	관급비	태양광발전시스템	43,174,890	조달구매
		조명기구	2,066,090	조달구매
통신공사	도 급 비		90,097,000	제한경쟁입찰

※ 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호

- 공사기간 : 착공일로부터 180일

- 하자보증기간 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제68조 및 시행규칙 별표1(공사의 공종별 담보책임의 존속기간)에 의함.

○ 예산과목

- 에너지절약과 생산으로 원전하나 줄이기, 신재생에너지 보급, 한강변 신재생 에너지벨트 조성, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		향후 계획

○ 2017. 10.  공사 입찰공고(재무과 계약의뢰)

○ 2017. 11.  공사계약 및 착공

○ 2018.  5.   공사완료