아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	노원구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	경춘선숲길 2단계구간 내 무허가건물 철거 및 폐기물처리 실정보고(2차)에 대한 회신

1. 노원구 공원녹지과-26906호(2017.9.28.), 서울특별시 공원조성과-11974호(2017.9.28.), 노원구 공원녹지과-27968호(2017.10.16.)와 관련한 내용입니다.

2. 경춘선숲길 2단계 잔여구간 내 무허가거물 철거공사 및 폐기물 처리용역 시 예측하지 못한 지하 폐기물로 인하여 물량 증가가 예상되어 예산 확보 요청한 사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 회신 내용

1) 설계변경(최종) 금액 확정 시 재배정 예정

2) 기 재배정한 예산이 불용되지 않도록 우선 낙찰차액 사용.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이동률		공원개발팀장	김경욱		공원조성과장	전결 10/23 최현실
협조자
시행	공원조성과-12761	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2065	/전송	02-2133-1081	/	ryul9386@seoul.go.kr	/	대시민공개