아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(도시생태환경 관리방안 수립 학술용역)

1. 시설계획과-13353호(2017. 10. 26.)와 관련입니다.

2. 우리 과에서 추진중인 『도시생태환경 관리방안 수립 학술용역』에 대하여 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명 : 도시생태환경 관리방안 수립 학술용역

○ 용역금액 : 금97,000,000원(금구천칠백만원) - 변경없음

○ 용역기간 : 2017. 4. 11. ~ 2017. 11. 8.

○ 용역업체 : 동국대학교 산학협력단

나. 변경 내역

○ 변경사항

(단위 : 원)

구 분	당초	변경	증·감	비고
용 역 비	97,000,000	97,000,000	변경없음
용역기간	2017. 4. 11. ~ 2017. 11. 8.	2017. 4. 11. ~ 2017. 12. 28.	증 50일

○ 변경사유 : 당초 과업내용서 외 추가사항 발생

- 환경성검토 항목에 스코핑 제도 도입

- 환경성검토 공간구상 및 도면화 도입에 따른 업무매뉴얼 작성

○ 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 : 미부과

붙 임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연장 방침서 1부.

4. 과업내용서 1부.  끝.

	시설계획과장
주무관	석은주		생태환경계획팀장	송윤락		시설계획과장	10/31 김진효
협조자	계약2팀장	이태영
시행	시설계획과-13571	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청별관 2동 2층 시설계획과	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2133-8420	/전송	02)2133-0739	/	ejsuk1030@seoul.go.kr	/	대시민공개