문서번호	안전총괄과-14734
결재일자	2017.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
안전제도팀장	안전총괄과장	안전총괄관
황원근	송정재	11/03 이진용
협 조

여의도 지하벙커 하수관 미시공구간 조치계획 보고

2017. 11.

안전총괄본부

(안전총괄과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

여의도 지하벙커 하수관 미시공구간 조치계획 보고

여의도 지하벙커 주변 하수관 이설공사 중 지하매설물 과다로 연내 이설공사가 불가한 구간이 발생하여 조치계획을 보고 드림

□ 공사개요

○ 규  모 : 지하1층·지상1층 연면적 963㎡(전시장)

○ 사업비 : 35억 원 (건축·토목, 설비, 이설비 등)

○ 기  간 : '16.10.14. ~  '17.11.15.(두방종합건설주식회사)

□ 문 제 점

○ 하수관 이설 구간중 확대 개량 불가 구간 발생

- 규모 : D=600→700㎜, 연장 175m중 65m

- 사유 : 공사구간 지하매설물(도시가스, 한전, 통신관 등) 과다 저촉

○ 하수도 관리청인 영등구청 협의 결과(’17.10.30.)

- 당초 협의 조건대로 미시공 구간 공사완료 또는 2018년도에 영등포구에서 시행토록 공사비 180백만원 배정

○ 도시기반시설본부 의견(’17.10.31.) : 영등포구가 시행토록 조치

□ 조치계획

○ 하수관 미시공 구간은 영등포구청이 시행토록 구에 예산 배정

- 규  모 : D=600→700㎜, 연장 65m

- 배정액 : 180백만 원(여의도 지하벙커 개선사업 시설비 활용)

붙임 : 관련 공문 1부.  끝.