문서번호	한강관광사업과-2296
결재일자	2017.11.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무부장
구경태		11/06 박기용
협조

‘한강함상공원’ 함상전시물

설계 및 제작․설치용역 과업내용 변경계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

한강사업본부

(한강관광사업과)

‘한강함상공원’ 함상전시물

설계 및 제작․설치용역 과업내용 변경계획

『한강함상공원 전시물 설계 및 제작․설치용역』당초 과업내용을 수정된 디자인 컨셉 및 전문가 회의결과에 맞게 변경하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 한강함상공원 함상전시물 설계 및 제작․설치용역

○ 사업기간 : 2016. 12.15.~ 2017. 11.25.

○ 계약금액 : 총 1,200,000,000원

○ 대표계약자 : ㈜임팩트디자인그룹(대표 우인하)

□ 추진현황

○ 전체 전시디자인 컨셉 확정

○ 전시콘텐츠 디자인 개발 완료(안내센터 및 잠수함, 서울함, 잠수함)

○ 패널, 그래픽 디자인 확정

○ 실물모형 제작대상 확정 및 제작업체 선정

○ 영상연출 소프트웨어/하드웨어 선정작업

□ 과업변경 계획

○ 변경사유

－ 함상공원 컨셉이 일부 수정되고, 당초 수상에 정박․계류시킬 예정이던 고속정 및 잠수함을 육상에 배치하도록 계획이 수정됨.

－ 전문가 집중회의 결과,

▸ 안내센터 조성규모 당초 240㎡에서 485㎡로 확대되어 내부 전시분야 과업내용이 증가함.

▸ 서울함 전시 컨셉이 ‘원형 그대로 전시’ 원칙에 따라, 내부개조, 스토리텔링 등의 과업이 취소됨.

▸ 고속정 1척의 도입이 취소되고, 도입 고속정의 엔진룸 전시기획 내용이 수정됨

○ 변경내용 : 구체적인 변경내용은 별첨

□ 향후일정

○ 과업변경 내용 통보        ´17. 11.6.

○ 설계변경 방침 수립        ´17. 11.7.

○ 함상공원 개장             ´17. 11.22.

별 첨 :『한강함상공원 함상전시물 설계 및 제작․설치용역』과업내용 세부변경 내역 1부. 끝.