문서번호	시설보수과-4258
결재일자	2017.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
양지웅		박춘배	11/14 代박영종
협조
	주무관		최태석

용두4교 등 4개소 도로시설물 내진성능보강공사 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

성 동 도 로 사 업 소

(시설보수과)

용두4교 등 4개소 도로시설물 내진성능보강공사 추진계획

우리 사업소(시설보수과)에서 유지‧관리하고 있는 용두4교 등 4개소 도로시설물에 대하여 내진성능보강공사 추진계획을 수립‧시행, 조기에 내진성능을 확보하여 시설물의 내구성 증진과 공공의 안전성 확보에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 대한 특별법 시행령 25조

- 시설물의 안전 및 유지 관리 예산의 확보 등

○ 교량시설물 내진성능평가 및 보강공사 추진계획(교량안전과-4900,‘17.3.17.)

○ 17년 내진보강공사 발주계획 보고(교량안전과-17779, ‘17.9.28.)

□ 사업개요

○ 대상 도로시설물

시 설 명	종 별	위 치	규 모	구조 형식	상태등급
용두4교	법정외	동대문구 용두동 791 ~ 용두동 122	L=46m B=32m	PSCI	B
제1제기교	법정외	동대문구 제기동 677-1 ~ 제기동 135-58	L=50m B=26.5m	RA	B
동진교	법정외	동대문구 신설동 93 ~ 용두동 254	L=20m B=31m	RCS	B
먹골교	법정외	중랑구 공릉동 284-5 ~ 묵동 5	L=42m B=40m	RCS	B

○ 예산액 : 862,390천원

-예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리,

교량시설물 내진보강공사, 시설비및부대비, 시설비

□ 추진경위

○ ‘17.3.17.  : 교량시설물 내진성능평가 및 보강공사 추진계획 통보(교량안전과)

○ ‘17.5.17.~9.28. : 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계용역

○ ‘17.10.10. : 17년 내진보강공사 발주계획 알림(교량안전과)

○ ‘17.10.24. : 계약심사 의뢰

○ ‘17.11.14. : 계약심사 완료

□ 사업 시행 계획

○ 추진 방향

- 내진성능보강공사 실시설계서에 의거 공사발주 및 시행

· 용두4교(받침교체 72EA, 콘크리트전단키 설치 10EA)

· 제1제기교(기둥섬유보강 28EA)

· 동진교(강재전단키 설치 16EA, 콘크리트전단키 설치 3EA)

· 먹골교(강재전단키 설치 12EA)

○ 예산 집행 계획

구 분		금 액 (천원)	비 고
용두4교 등 4개소 도로시설물 내진성능 보강공사	도급비	778,832
	관급비	68,068
	이전비
	총 계	846,900

□ 추진 일정

○ 예산재배정 요청 : 2017. 11. 15.(교량안전과)

○ 공사 발주 : 2017. 11.

○ 계약·착공 : 2017. 12.

○ 공사 준공 : 2018. 6.

□ 입찰 및 낙찰자 결정

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰(지역의무 공동도급)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법에 의한 시설물유지관리업 등록한 업체.

- 지역의무 공동도급(공동이행방식)대상 공사이므로 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 서울특별시에 주된영업소를 둔자를 반드시 구성원으로 하여야하며, 지역업체의 시공참여 비율은 49%이상이어야 함.(단, 서울시에 소재한 업체는 단독참여 가능)

- 공동 수급체 구성원 수는 대표사 포함 2개사 이내로 하며, 대표자는 출자 비율의 비중이 높은 업체로 함.

- 본 공사는 특허공법(자재)이 적용되는 공사로 사용협약서를 체결하여 시공하여야 함.

□ 행정사항

○ 계약심사 결과 및 감독기관(서울시설공단) 사전검토사항 설계내역서에 반영하여 공사발주 및 계약 의뢰

○ 조속한 공사계약을 위하여 긴급공고 조치하여 발주하고자 함.

붙임  계약심사 결과 1부.  끝.