투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	도시철도사업부장
(경유)
제 목	우이신설 도시철도 민간투자사업 총사업비 조치계획 요청에 대한 회신

1. 도시철도사업부-11661호(`17.11.03.)관련입니다.

2. 우이-신설 도시철도 민간투자사업의 준공 시 정산금액(감 6,888백만원, `06.1.1.기준) 대비 공기연장에 따른 간접비 확정액(증 19,783백만원, 경상가)이 더 크므로 총사업비 변동없이 처리하시기 바라며,

3. 향후 소송결과에 따라 최종 총사업비를 확정할 예정임을 알려드리오니  금번 건설보조금 지급 시에는 상기의 총사업비 조치계획을 감안해 처리하여 주시길 바랍니다. 끝.

								도시철도계획부장
주무관							송정아				경전철관리과장					김동철					도시철도계획부장					11/14 代최병훈
협조자
시행			도시철도계획부-11130										(						)		접수												(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 10층 도시기반시설본부 도시철도계획부																/
전화		02-772-7156							/전송			02-772-7304					/														/	부분공개(5)