아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 설계변경에 따른 계약 의뢰

1. 동남권사업단-12320(2017.11.29.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행중인 「영동대로 지하공간 복합개발 국제설계공모 관리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명: 영동대로 지하공간 복합개발 국제설계공모 관리용역

나. 용역기간: ’17. 4. 3. ~ ’17.12.31.

다. 계 약 자: (사)대한국토도시계획학회

라. 설계변경사유: 과업내용 증가 및 수량 변동에 따른 경비 정산

마. 설계변경내용: 2,800천원 증(230,000천원 → 232,800천원)

(단위: 천원)

구분		금액				비고
		당초	변경	증감
경비	심사진행비	3,900	3,600	(감)	300	․현장답사 버스대여비, 진행경비 등 변경
	심사위원비	45,787	49,841	(증)	4,054	․심사 2회 → 1회 변경에 따른 경비 감소 ․지명초청선정위원회 및 기술검토위원회 진행 경비 발생
	행사비	33,931	32,932	(감)	999	․해외수상자 미발생에 따른 경비 변경 ․심사장 대여비 및 기자설명회 자료 작성비용 발생
	인쇄비	17,330	17,730	(증)	400	․심사 시 사용하는 지침 부수 증가
	통신비 등 제잡비	5,473	4,797	(감)	675	․해외수상자 미발생에 따른 경비 변경
일반관리비		8,683	8,759	(증)	66	․경비증가에 따른 변경[(인건비+경비)×5% 이내]
부가가치세		20,909	21,164	(증)	254	․경비증가에 따른 변경[용역원가×10%]
계		136,013	138,823	(증)	2,800	※ 용역기간 변경없음

바. 예산과목: 지역발전본부 동남권사업단, 도시재생 및 공공개발, 국제교류 복합 공간 육성(광역교통시설특별회계), 영동대로 지하공간 복합개발, 시설비(401-01)

붙임 1. 설계변경 방침 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 과업내용서(변경) 및 설계내역서(변경) 각 1부.  끝.

	동남권사업단장
주무관	설성혜		조성사업팀장	이정화		동남권조성반장	11/30 김용학
협조자
시행	동남권사업단-12361	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 5층	/
전화		/전송	02-2133-0741	/		/	대시민공개