투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보(2017년 전기설비 유지보수 연간단가)

1. 시설과-4403(2017. 12. 29.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 통보합니다.

가. 건    명 : 2017년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

나. 계 약 자 : ㈜영재전력 대표 최권영

다. 계약금액 : 금104,953,570원(금일억사백구십오만삼천오백칠십원)

※ 원인행위No : 1349

라. 계약기간 : 2017. 3. 21.~ 2017. 12. 31.

마. 변경내용 : 계약금액 및 준공기한 변경

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
도 급 액	공급가액	95,412,337	82,040,000	-13,372,337
	부가세	9,541,233	8,204,000	-1,337,233
	도급공사비	104,953,570	90,244,000	-14,709,570

1) 준공기한 변경

당초 : 2017. 12. 31. → 변경 : 2018. 3. 31.

붙임  공사계약서류 각 1부.  끝.

	공원운영과장
★주무관	김호영		주무관	조기환		공원운영과장	12/29 문근식
협조자
시행	공원운영과-21311	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)