문서번호	공원녹지정책과-48
결재일자	2018.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장		푸른도시국장
임성수	이용남	유영봉		01/02 최윤종
협 조	주무관		안규문
	주무관		황서현

2018. 시공원 시민참여예산사업 추진계획

2018. 1.

푸른도시국

공원녹지정책과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018. 시공원 시민참여예산사업 추진계획

시민이 직접 제안한 시공원 내 시민참여예산사업을 효율적으로 추진하여 공원을 이용하는 시민들에게 쾌적한 공원 환경을 제공하고자 함

※ 근거 : 서울특별시 주민참여예산제 운영 조례

Ⅰ		사업개요

□ 대    상 : 중구청 등 12개 자치구 24개 사업(붙임1 참조)

□ 사업기간 : 2018. 1. ~ 11.

□ 사업내용 : 시공원 내 노후시설물 보수 정비 및 시설개선

□ 추진방법 : 사업별 설계 심의 후 예산 재배정하여 사업 시행

□ 총사업비 : 3,717백만원(사무관리비 68, 시설비 3,649)

□ 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원 내 시설물 유지보수 등(시민참여), 사무관리비(100-201-01)(시설비 100-401-01)

Ⅱ		세부추진계획

추진절차

① 기술용역타당성 심사		② 설계비 예산재배정 요청		③ 설계용역비 재배정
자치구→기술심사담당관		자치구→공원녹지정책과		공원녹지정책과→자치구

④ 설계용역 추진		⑤ 도시공원위원회 심의(필요시)		⑥ 설계심의 요청 및 심의
자치구(주민의견수렴 등)		자치구→공원조성과		자치구→공원녹지정책과

⑦ 설계심의 및 결과회신		⑧ 계약심사(공사비)		⑨ 공사비 재배정 요청
공원녹지정책과→자치구		자치구→구자체 또는 계약심사과		자치구→공원녹지정책과

⑩ 공사비 재배정		⑪ 공사 추진		⑫ 착공 및 준공 보고
공원녹지정책과→자치구		자치구		자치구→공원녹지정책과

실시설계

	설 계 기 준
▸「공원시설 설치 및 관리지침」적용 (‘17.6.22. 기시달, 공원녹지정책과-10634) ▸ 공원시설 색상·디자인 조화 →「공원시설 색채 디자인 가이드라인」적용 ▸「무장애 친화공원 가이드라인」,「유니버셜디자인 통합 가이드라인」적용 ▸「공공화장실 디자인 가이드라인」및「여행화장실 가이드라인」준수 ▸ 공원안내판은 개선된“도시공원 안내체계”매뉴얼에 맞도록 설계 ▸ 기존 로프휀스는 철거하고 목재휀스는 안전상 꼭 필요한 구간에만 설치 ▸ 공원조성 기준에 맞추되 지역 주민의 의견과 편의 고려 ▸ 어린이, 노약자 등을 배려한 배치·구성 및 위험시설 우선 정비 ▸ 지역 주민의 입장에서 예산낭비 요인이 없도록 유의

□ 설계심의 요청

- 대    상 : 총공사비 1억원 이상(1억원 미만은 서류 심사)

- 요청시기 : 설계 완료 20일전

- 제출서류 : 설계심의요구서, 현장 동영상, PPT 자료, 설계도서 각 5부

□ 설계심의

- 심의시기 : 심의요청일로부터 7일 이내

- 장    소 : 푸른도시국 회의실(9층)

- 심의위원 : 5~6명(공원녹지정책과장 및 팀장)

- 사업설명 : 자치구 담당 팀장 및 용역수행자(책임기술자)

- 심의결과 : 심의결과는 설계에 반영하고 조치 결과 제출

□ 서울특별시 도시공원위원회 심의(필요시)

- 건축물 신축, 시설물 등의 설치에 따라 공원조성계획 변경이 필요한 경우

공사시행

□ 공사안내판(현수막) 설치 및 관리 철저

□ 식재 적기에 나무를 심을 수 있도록 공사 조기 발주

□ 2018.11월 까지 사업이 완료될 수 있도록 적극 추진

□ 착공 보고(착공 후 3일 이내) 및 준공(정산) 보고(준공 후 10일 이내) 철저

추진일정

□ 2018. 1. ~ 2. : 사업계획 수립 및 시달, 설계용역 착수

- 기술용역타당성 심의(자치구→기술심사담당관)

- 설계비 재배정(시→자치구)

□ 2018. 3.~     : 설계심의, 계약심사, 공사비 재배정

□ 2018. 4.~11. : 공사 발주, 착공 및 준공

붙임 : 1. 2018년 시공원 시민참여예산사업 현황 1부.

2. 공사설계심의 요구서 1부.

3. 공사 착공보고서 1부.

4. 공사 준공(정산) 보고서 1부.  끝.