투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기의뢰(서울창업허브 별관 리모델링)_3자단가

우리 본부에서 추진하는『서울창업허브 별관 리모델링공사』에 소요되는 관급자재 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

연번	납품요구 번호	품 명	계약자	계약금액	납품기한
					당 초	변 경
1	*************	LED실내조명	*********	***********	`18.01.09	`18.02.28
2	*************	LED보안등기구	***	**********	〃	〃
3	*************	가로등주	*******	**********	〃	〃
4	*************	경관조명 (볼라드)	******	**********	〃	〃
5	*************	LED실내조명	******	***********	〃	〃
6	*************	LED실내조명	*********	***********	〃	〃
7	*************	경관조명 (벽부등)	*****	**********	〃	〃
8	*************	LED실내조명	*****	**********	〃	〃
9	*************	태양광 발전장치	********	************	〃	〃
10	*************	무정전 전원장치	*********	**********	〃	〃
11	*************	방화벽장치	****	***********	〃	〃
12	*************	무선랜 엑세 스 포인트	*****	***********	〃	〃
13	*************	네트워크 스위치	*****	***********	〃	〃
14	*************	네트워크 스위치	*****	**********	`18.2.17	〃

가. 납품기한 연기 내용

나. 연기사유 : 선행공정 지연으로 설치시기 미도래

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 납품기한 연기 합의서 14부. 끝.

	설비부장
주무관	정찬교		녹색성장과장	오삼록		설비부장	01/03 권오식
협조자
시행	설비부-92	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/	jamjaco@seoul.go.kr	/	부분공개(7)