＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	변경 계약체결 안내

공사 ․ 용역 ‧ 물품 변경계약을 아래와 같이 체결하고 계약서 사본을 붙임과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 변경 계약내역

변경 계약일자	건 명	계약상대자	계약금액		준공기한 (변경없음)
			당초	변경
2017.12.26	2017 암사아리수정수센터 기계설비보수공사(연간단가)	홍선산업(주) 이희천	248,078,850	248,078,850 (물량만 변경)	2017.12.29
2017.12.26	암사1정수장 여과지 하부집수장치 개선공사	삼현기업(주) 김성춘	1,146,279,320	1,172,039,000	2017.12.30
2017.12.27	암사아리수정수센터 시설물유지보수공사(2차)	동영건설 손한의	401,700,000	405,578,000	2017.12.29
2017.12.26	암사아리수정수센터 취,정 수장 및 고도정수처리시설 정밀점검용역	㈜백산엔지니어링 외 1개사 이정호	147,710,000	141,163,790	2017.12.29
2017.12.26	제1염소실 천장호이스트 구매 ‧ 교체	인성기계산업 허용국	14,828,000	12,920,000	2017.12.31

붙임 : 변경 계약서 사본 5부.  끝.

	행정관리과장
주무관	변민용		행정관리과장	01/03 정수현
협조자
시행	행정관리과-70	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02)3146-5712	/전송	02)3146-5707	/	byunmy@seoul.go.kr	/	대시민공개