문서번호	도시철도토목부-193
결재일자	2018.1.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목3과장	도시철도토목부장
이재선		호경수	01/04 이도헌
협 조
	주무관			정삼기

『서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사』

폐기물처리용역 발주계획 검토 보고(8차)

2018. 1.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사』

폐기물처리용역 발주계획 검토 보고(8차)

『서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사 폐기물처리용역』과 관련 8차 발주계획에 대해 검토 보고 드림. ※ 관련문서 : 동명감923 제2018-002호(2017.1.4.)

1		개요

❍ 용 역 명 : 서울지하철9호선 3단계 923공구 건설공사 폐기물처리용역

❍ 계약금액 : 522,600천원

❍ 계약기간 : 2010.11.10. ~ 2018.12.31.

❍ 계 약 자 : 고려개발(주) 대표이사 최경숙 외 1개사

❍ 폐기물 준공 및 발주현황

(단위 : 천원)

구분	총 괄	기 발주 (1~7차)	금회발주 (8차)	장래	비고
용역기간	2010.11.10. ~2018.12.31.	2010.11.10. ~2017.12.31.	착 수 일 ~2018.12.31.	-
용 역 비	522,600	465,600	57,000	-
비 율	100%	89.1%	10.9%	-

2		보고 내용

❍ 8차 폐기물처리용역 발주물량

구 분	단위	총 괄	발 주 현 황			잔 여	비고
			기발주	8차(금회)	소계
폐콘크리트	ton	7,230	7,163	67	7,230	-
폐아스콘	ton	25,414	21,795	3,619	25,414	-

❍ 8차 폐기물 처리용역 설계

구 분		단가(원)	수량(ton)	금 액(원)	비고
운반비	폐콘크리트	4,812	67.198	323,358
	폐아스콘	4,796	3618.872	17,356,111
처리비	폐콘크리트	11,107	67.198	746,370
	폐아스콘	9,398	3618.872	34,010,160
소 계				52,435,999
적 용				51,818,182	단수조정
부가가치세(10%)				5,181,818
합 계				57,000,000

❍ 용역기간 : 착수일로부터 ~ 2018.12.31.

3		책임감리원 검토의견

❍ 서울지하철9호선 3단계 923공구 건설공사와 관련하여 폐기물처리용역 발주(8차)에 대해 검토한 결과 9차공사 발주범위의 공사추진현황을 반영한 내역 작성은 적정함.

4		조치 계획

❍ 923공구 9차공사추진에 따라 발생하는 건설폐기물의 원활한 처리를 위하여 건설폐기물 처리용역(8차)을 발주하고자 함.

구 분	용역기간	계약금액	비 고
8차	착수일로부터 ~ ‘18.12.31.	57,000천원

붙 임 1. 책임감리원 검토의견서 1부.

2. 설계내역서(8차) 1부.  끝.