문서번호	시설과-90
결재일자	2018.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장		관리부장		서울대공원장
이재균	代백강석		오임석		심상원		01/05 송천헌
협 조
	전문관					강명식
	주무관					백강석
	주무관					김학석
	주무관					박도원

2018년 대공원 기계설비 유지관리 추진계획

2018. 1월

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2018년도 대공원 기계설비 유지관리 추진계획

대공원 주요 기계설비에 대하여 매년 정기적으로 시행하는 사업을 적기에 시행하고, 노후 시설물에 대하여는 보수 및 개선공사를 실정에 맞게 시행함으로써 기계시설물 유지관리에 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		기계설비 현황

□ 기계실 및 시설물현황

구분	계	주 보일러실	펌프장	배수지/ 조절저수지밸브실	오 수 처리장	동물사/ 사무동	분수대	도시가스정압기실
개소	45	1	3	2 / 2	1	21 / 7	2	6

□ 주요 장비현황

구분	계	보일러	냉동기	공 기 조화기	EHP 실외기/실내기	급･배기 송풍기	열 교환기	승강기	여과기	지 열 설 비
대수	275	48	2	16	26/114	41	16	2	4	6

□ 기계시설물 세부현황

○ 배수지 현황: 4,020톤(시수 2,640톤, 지하수 1,380톤)

- 일일 평균사용: 시수 2,500톤, 지하수 1,200톤

○ 배관 현황: 공동구 내 배관 약 9.2km(급수, 난방, 지하수, 소방배관)

○ 가스배관: 총 14km(중압관 2km, 저압관 12km)

○ 지하수 설비: 경마공원 근처 심정 6개소, 1,200톤/1일

○ 난방 시스템: 동양관, 남미관, 식물원, 대동물관 4군데에서 개별보일러 가동하여 지역난방 공급

Ⅱ		2018년 세부 추진계획

□ 기계설비 개선사업

○ 기계설비 단독 사업으로 7건의 신규사업과 2건의 사고이월사업

연번	사 업 명	사 업 개 요
1	동물사 실내 공기질 개선	기 간: 2018. 1월 ～ 9월 사 업 비: 500백만원 대 상: 제1･2아프리카관, 대동물관, 호주관, 꼬마동물사, 동양관 사업내용: 공기순환기, 공기순환용팬 설치 및 부대공사
2	노후 동물사 기계설비 개선사업	기 간: 2018. 1월 ～ 9월 사 업 비: 500백만원 대 상: 유리온실 등 10개동 사업내용: 난방설비･급수관･여과장치 교체 및 신설, 냉난방기 신설
3	잡용수배관 교체공사 (3단계)	기 간: 2018. 2월 ～ 11월 사 업 비: 600백만원 규 모: 잡용수배관 2.0km 교체, 4.8km 철거 사업내용: 지하구내 노후 잡용수배관 교체 및 철거
4	기계시설물 정비(연간단가)	기 간: 2018. 1월 ～ 12월 사 업 비: 450백만원 대 상: 대공원 원내･외 사업내용: 기계설비 정비(연간단가), 긴급 보수, 정기 점검 등
5	오수처리시설 정비	기 간: 2018. 1월 ～ 12월 사 업 비: 50백만원 규 모: 오수처리장 사업내용: 오수처리시설 전처리시설, 소독설비, 여과시스템 유지보수
6	오수처리장 노후 수중포기기 및 교반기 개선	기 간: 2018. 2월 ～ 12월 사 업 비: 300백만원 규 모: 오수처리장 수중포기기 및 교반기 4개소 사업내용: 수중포기기 및 교반기 4개소 개선
7	사회적 약자 이용 음수대 교체	기 간: 2018. 2월 ～ 8월 사 업 비: 60백만원 규 모: 대공원 내 음수대 6개소 사업내용: 음수대 6개소 교체 및 음수대 통행로 6개소 개선
8	황새마을 시설개선 기계설비공사 (사고이월사업)	기 간: 2018. 1월 ～ 3월 사 업 비: 105백만원[기성금 67백만원(‘17.12월)] 규 모: 황새마을(내실 121㎡, 외부 방사장 1,351㎡) 사업내용: 내실 난방배관공사, 외부 방사장 위생배관공사 등
9	동물·조류격리사 냉난방용(EHP) 구매 (사고이월사업)	기 간: 2018. 1월 ～ 3월 사 업 비: 12백만원 규 모: 제1격리사(실외기 1대, 실내기 3대) 사업내용: 사육사실 및 조리실 냉난방기(EHP) 설치

※ 사고이월사업을 제외한 개선사업별 세부추진계획은 별도 보고후 사업 추진

○ 사업별 세부일정표

사 업 명	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월		8월			9월	10월	11월	12월
동물사 실내공기질 개선	계획	2월:설계 4월:발주			5월:착공 9월:준공
노후동물사 기계설비 개선	계획	2월:설계 4월:발주			5월:착공 9월:준공
잡용수배관 교체공사(3단계)		계획					발주 계약		8월:착공 11월:준공
기계시설물 정비 (연간단가)	발주 계약	2월:착공 3월:공사시행 12월:준공
오수처리시설 정비	발주 계약	2월:착공 3월:공사시행 12월:준공
오수처리장 노후 수중포기기 및 교반기 개선		계획	2월:설계 4월:발주									발주 계약	10월:착공 12월:준공
사회적 약자 이용 음수대 교체		2월:설계 4월:발주				6월:착공 8월:준공
황새마을 시설개선 기계설비공사	1월:재착공.3월:준공
동물·조류격리사 냉난용(EHP) 구매	1월:재착공.3월:준공

□ 기계설비 유지관리

○ 기계설비 법정검사 4건 및 수질검사 6건 시행

연번	법정검사명	점검대상 (장소)	점검 시기	관련법규	시행기관
1	검사대상기기 계속사용검사	보일러 10톤 2대 (주보일러실)	8월	에너지이용합리화법 제39조 및 시행규칙 제31조의6	에너지관리공단
2	도시가스 특정사용시설 정기검사	정압기 등 가스설비 일체 (대공원)	10～11월	도시가스사업법 제17조	한국가스안전공사
3	승강기 정기검사	장애인용 승강기 1대 (종합안내소)	11～12월	승강기시설 안전관리법 제13조제1항 및 같은법 시행규칙 제18조	한국승강기안전공단
4	유해, 위험기계 (호이스트) 안전검사	호이스트 (오수처리장)	1월	산업안전보건법 제36조	(재)한국승강기안전기술원
5	수질검사	배수지(년 1회)	10월	수도법 시행규칙 제22조의3 제4항	서울특별시 보건환경연구원
		지하수(2년 1회)	4월	지하수법 제20조
		연못(년 4회)	분기별	환경정책기본법제12조
		분수대 수질검사	5～10월	물놀이형 수경시설의 수질관리지침(환경부)
		급수관 정체수 (2년 1회)	10월	수도법 제33조제2항 및 같은법 시행규칙 제23조제1항	강남수도사업소
		음수대(년 4회)	분기별	상수도본부 공공시설(공원) 음수대 수질관리 규정

○ 유지관리 용역 4건 시행

연번	용역명	대상시설	용역시행	용역비 (천원)	사업내용
1	승강기 유지관리 용역	종합안내소 승강기 1대(15인승)	1～12월 (매년)	2,000	승강기 안전운행을 위하여 법률에 정한 자격이 있는 업체가 월 1회 이상 점검 및 정비 시행
2	도시가스 설비 분해점검 용역	정압기 6개소, 조정기 7대	8월 (매년)	3,000	‘도시가스 특정사용시설 정기검사’ 대상 설비를 공인검사기관에 의뢰하여 정압기 및 조정기 분해점검 실시
3	보일러 세관 용역	주보일러실 650만 2대, 식물원 200만 1대, 동양관 200만 1대	10월 (매년)	15,000	보일러 효율 증대를 위한 세관작업 및 버너 연비 조정
4	저수조 청소 용역	제1배수지 1,250톤 제2배수지 1,250톤 제1펌프장 1,300톤 제2펌프장 80톤 자연캠프장 140톤	4, 10월 (매년)	22,000 (9,000:기본경비)	수도법 제33조 및 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한규칙 제6조 규정에 의거 배수지 내부 청소

○ 기계설비 자재 구매

연번	건 명	기 간	구매품목	사업내용
1	기계설비 자재 구매	1～12월	- 보수용 기계설비 자재 - 위생기기, 컨벡터 - 펌프, 공구 등	기계설비 자체 보수를 위한 소모성 자재와 장비를 구매

□ 공무직 운영관리

○ 시설정비원 공무직 62명 관리 운영에 필요한 예산 집행

연번	예산과목	사업내용	시행시기	세부내역
1	사무관리비	공무직 직원의 안전화와 소모성 사무용품, 생활용품 구매	5～6월	- 안전화 등
2			3, 7월	장갑, 비누 등 생활용품 사무용품 구매와 및 사무기기 유지관리
3	공공운영비	공무직 현장 공구 구입	3, 7월	기계, 전기, 토목, 건축, 공구 구매
4		현장 관리차량 유지관리	1～12월	현장 보수차량 주유비, 전기차 유지관리 및 보수
5		공무직 치료비	1～12월	공무직 산재보험 치료보전
6		공무직 사무환경 개선공사	3～6월	- 사무실 환경개선 공사
7	자산및물품취득비	장비 및 비품구입	3～4월	- 공무직 업무에 필요한 사무용 비품구입

□ 종합공사 기계분야 추진사업

○ 종합공사 중 기계분야 공사감독 4건 시행

연번	사 업 명	사업개요
1	해양관 환경 개선 및 전시	사 업 비: 1,500백만원 주 공 종: 건축시설팀 대 상: 해양관 돌고래 관람장 사업내용: 관람장 냉난방공사, 위생배관공사 등
2	사자사 환경개선 및 전시(2단계)	사 업 비: 2,850백만원 주 공 종: 시설안전팀 대 상: 사자사 내실 및 외부방사장 사업내용: 내실 난방, 환기, 위생배관공사, 외부방사장 위생배관공사
3	아시아존 조성 1단계(랫서팬더)	사 업 비: 550백만원 주 공 종: 시설안전팀 대 상: 랫서팬더 방사장 및 내실 사업내용: 내실 냉난방공사, 위생배관, 환기배관공사
4	원내 화장실 리모델링 공사	사 업 비: 300백만원 주 공 종: 건축시설팀 대 상: 원내 화장실 사업내용: 화장실 위생배관공사, 위생기기 교체공사

Ⅲ		소요 예산

□ 2018년 기계화공팀 예산금액 2,768백만원(시설과 예산의 28%)

(단위: 백만원)

구 분	합 계	유지보수비					안전 시설비	공무직
		사무 관리비	공공 운영비	재료비	시설비	소계
예산금액	2,768	24	80	84	860	1,048	1,600	120
비율(%)	100	-	-	-	-	37.9	57.8	4.3

□ 사업별 세부 예산금액

(단위: 천원)

예산과목		사업명	2017년	2018년	비 고
공원 시설물유지 보수 및 정비	사무관리비	오수처리시설 슬러지 처리 수수료	18,388	18,388
		오수처리시설 슬러지 매립수수료	6,076	6,076
	공공운영비	유량조정조 슬러지 준설	24,000	24,000
		침전지 슬러지 처리	34,720	34,720
		침사지 협잡물 처리	8,120	8,120
		배수지 청소	13,000	13,000	9,000천원 기본경비 별도
	재료비	기계설비유지관리자재	49,500	49,500
		심정용 수중펌프구매	7,000	7,000
		수중포기기 구매	5,000	5,000
		오수처리시설 응집약품 구입	17,000	17,000
		수질측정용 시약 및 소금구매	5,000	5,000
	시설비	기계설비 정비	450,000	450,000
		오수처리시설 정비	50,000	50,000
		오수처리장 유량조 노후공급관 개선	250,000	-	사업 종료
		오수처리장 노후 수중포기기 및 교반기 개선	-	300,000	신규 사업
		사회적 약자 이용 음수대 교체	-	60,000	신규 사업
	소 계		937,804	1,047,804	증 110,000
공원 안전 시설 보수 및 정비	시설비	노후 동물사 기계설비 개선사업	500,000	500,000
		동물사 실내 공기질 개선	400,000	500,000
		해양관 기계설비 개보수사업	600,000	-	사업 보류
		지하구 잡용수 배관 교체	-	600,000	중장기 사업
	소 계		1,500,000	1,600,000	증 100,000
안전한공원 시설물관리 운영	사무관리비	사무용품 및 사무기기 유지관리 외 2건	39,000	40,000
	공공운영비	시설전기차량 관리비 외 3건	76,650	75,000
	자산및물품취득비	자산 및 물품취득비	18,100	5,000
	소 계		133,750	120,000	감 13,750
합 계			2,571,554	2,767,804	증 196,250

Ⅳ		행정사항

□ 동물원 난방기간(1~4월초, 11월말~12월)과 성수기(3~5월)에 공사를 최소화하여 관람환경과 동물사육환경 조성에 기여

□ 기계설비 개선사업은 세부계획 수립 후 추진 예정.  끝.