문서번호	시설개선과-114
결재일자	2018.1.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	체육시설관리사업소장
오상호	이재권	01/05 박영준
협 조
	주무관		윤승근

2018년 잠실야구장 환경개선공사 발주계획(안)

2018. 1.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

2018년 잠실야구장 환경개선공사 발주계획(안)

잠실야구장의 노후된 시설물을 정비함으로서 이용자들에게 쾌적한 관람환경을 제공하고 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업추진 배경

□ 근  거

❍ 2017~2021년 중기재정계획(지방재정법 제33조)

❍ 구단(두산, LG) 요구사항(잠운본 제2017-018호, 2017.6.30)

- 덧붙임 ″2018년 야구장 노후시설 개선요청 문서(①. ⑦, ⑪, ⑬번)″

□ 경  위

❍ 구단(두산베어스, LG트윈스)측으로부터 잠실야구장 노후시설에 대한 2018년도 개선요청 사항이 접수되어 검토하고 서울시 행정서비스 만족도 향상과 관람객들에게 쾌적한 관람문화 조성을 위해,

❍ ***************************************************************************************************

□ 필요성

❍ 쾌적한 관람 환경을 제공함으로서 행정서비스 만족도 향상 기대

❍ 노후시설 개선으로 시설물 내구년한 증대

Ⅱ		사업내용 및 발주방법

□ 사업내용

❍ 공사명 : 2018년 잠실야구장 환경개선공사

❍ 규  모

*********************************************

***********************************************

***************************************************

************************************************

*****************************************************

❍ 기  간 : 착공일로부터 ~ 2018.03.15

❍ 금  액 : ******************

□ 발주방법

❍ 입찰방법 : 긴급공고 및 제한경쟁입찰(지역제한)

❍ 입찰참가자격

건설산업기본법 제8조 및 동법시행령 제7조 별표1에 의한 *********

**********로서 입찰공고일 전일 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

Ⅲ		예산검토 및 추진일정

□ 예산검토

❍ ***************************-통합 발주

**********************************

**********************************

************************************

********************************************************************************

□ 추진일정

❍ 설계 및 발주방침 : 2018. 1월

❍ 계약심사 : 2018. 1월 중순

❍ 공사발주 : 2018. 1월 중순

❍ 공사계약 및 착공 : 2018. 1월말

❍ 공사준공 : 2018년 3월20일(프로야구 시즌 개막전 완료)

Ⅳ		기대효과

□ 노후 및 파손시설 개선

❍ 2층 관람석 통로 노후 안전난간 교체로 이동 관람객 안전확보와 유해곤충 발생을 차단하여 관람객 불편해소

❍ ***********************************************************************************************************************************

❍ 노후 및 파손되고 논슬립 기능을 상실한 외부 진․출입 데크 바닥을 정비하여 관람객들 이동시 안전사고 예방과 기능회복

❍ ******************************************************************

□ 관람객 보호시설 교체 및 보완

❍ *******************************************************************

******

Ⅴ		처리의견

□ **************

❍ ******************************************************************************

□ *****************************

❍ **********************************************************************************************************************

*************************************************************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ ***************

❍ **************************************************************************

□ 2018년 프로야구 시즌 전 공사완료

❍ 상기와 같이 조기발주하여 2018년 프로야구 시즌 전 공사를 완료하여 관람객들에게 편의을 제공코자 합니다.

덧붙임  공사설계(안) 1부.  끝.