문서번호	토목부-309
결재일자	2018.1.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
백종임		명경출	01/05 代이동훈
협 조
	주무관			임준우

아스콘 표층재(개질SMA 외 1종) 구매계획 보고

[한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사]

2018. 1.

아스콘 표층재(개질SMA 외 1종) 구매계획 보고

(한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사)

한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사에 사용되는 아스팔트콘크리트 표층재(개질SMA 외 1종)는 조달청 관급자재로 등록되어 있지 않아, 조달청 총액입찰로 구매하고자 구매계획을 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

○ 위    치 : 용산구 한남1고가 남단 ~ 서초구 한남대교 남단

○ 규    모 : 고가차도 철거 폭15m, 연장341m

중앙버스차로 2km(중앙정류소 3개소)

○ 기    간 : 2017. 12. 26. ~ 2018. 06.

○ 사 업 비 : 7,065백만원(도급비 5,004백만원,관급비1,348백만원,기타713백만원)

Ⅱ		추진경위

○ '16. 8.11  : 고가차도 관리계획 수립(행정2부시장방침)

○ '16. 9. 1  : 한남대로 BRT 사업시행계획 수립(행정1부시장방침)

○ '17. 4~9. : 한남2고가 철거 실시설계용역 시행(도기본 토목부)

○ '17.1~10 : 한남대로 BRT 기본 및 실시설계용역 시행(교통운영과)

○ '17.12.26 : 공사 착공

Ⅲ		구매대상 및 방법 검토

□ 구매수량 및 소요예산

품 명	규 격	단 위	수 량	소요예산(천원)
아스팔트콘크리트	WC-3, t=20mm, 1등급, 표층용, 도착도, PG64-22	톤	5,000	402,000
	개질SMA, t=13mm, 1등급, 표층용, 도착도, PG76-22		1,208	133,584
	총 계		6,208	535,584

○ 납품조건

- 1등급골재 사용

- WC-3 아스팔트콘크리트는 자재구매시방서, 단체표준규격서 가열아스팔트혼합물(한국아스콘공업협동조합연합회) 및 아스팔트 혼합물 생산 및 시공지침(국토부) 조건에 의거 납품

- 아스팔트콘크리트는 자재구매시방서 및 SMA 포장생산 및 시공지침(국토부) 조건에 의거 납품

○ 납품기간 : 계약체결일 ～ 2018년 6월 30일

○ 현장위치 : 용산구 한남1고가 남단 ~ 서초구 한남대교 남단

○ 인도조건 : 현장 도착도

○ 소요예산 : 535,584천원(부가세 포함)

- 예산과목(교통사업특별회계) : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스이용제고, 한남대로 중앙버스전용차로 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 물품 구매 계획

○ 발주시기 : 2017년 1월

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(총액, 제한적최저가, 낙찰하한율 87.995%)

○ 기초금액 : 471,287천원

○ 입찰참가자격

- G2B분류번호(10자리, 3011159701)를 제조물품으로 입찰참가 등록

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제8조에 의한 중소기업자로서, 직접생산확인서(물품분류번호 3011159701, 아스팔트콘크리트)를 소지한 업체

Ⅳ		향후 추진계획

○ 2018.  1. : 조달청 총액입찰 의뢰(⇒ 건설총괄부)

○ 2018.  2~ 2018. 6. : 도로포장 시행

붙임 : 1. 내역서 1부.

2. 견적서 1부.

3. 물품구입 집행계획서 1부.

4. 자재구매 시방서 각1부

5. 물품구매설명서 1부.  끝.