시설관리팀 업무인계ㆍ인수서(발령일 전)

□ 담당업무

○ 마곡지구 상수도시설 인수인계 등 협의

○ 급수운영 (단수, 수계전환) 계획수립 및 시행(소출수, 미급수지역, 민원처리 포함)

○ 과 유수율(기술분야) 관련업무

○ 지역민원 및 수질관리 총괄 (20개동, 중블록 포함)

(발산1동, 우장산동, 가양1~3동, 공항동, 방화1~3동, 화곡본동, 화곡1~4동, 화곡6,  화곡8동, 등촌1~3동, 염창동)

□ 주요 인수인계 사항

○ 마곡지구 추진사항

- 마곡지구 1~10차 통수 완료(시설대비 82%)

▸배수관 부설 D=80~1,000㎜, L=42.2㎞(밸브류 616개소)

구 분		계 획		부 설		공정
		관로	밸브류(개)	관로	밸브류(개)
택지개발	1공구	21.6km	362	21.6km	362	완료
	2공구	29.5km	442	16.4km	161	56%
이설	3-1공구	1,815m	23	382m	15	21%
순환관망	서울식물원	2,061m	협의중	883	-	43%
	3-2공구	650m	협의중	-	-	-

▸블록별 급수 추진현황 : 급수율 46.8%                              (단위, 블록)

구분		계	공동주택	학교	병원	근린시설	기타
계		502	15	6	1	427	53
건축물 급수협의	급수완료	149	13(8,521세대)	4(5,200명)	1	104	27
	미급수	79	-	-	-	61	18
건축물 급수미협의		274	2(2,106세대)	2	-	262	8

- 마곡지구(1공구) 인수인계 완료(21.6㎞) : ’16.8.11.

- 하자담보 책임기간(3년)내 민원처리 업무한계

▸누수복구 : 수도사업소에서 선 조치 후 서울주택도시공사에 원인자부담금 부과

▸시설물(밸브류, 맨홀) 보수 : 서울주택도시공사에 이첩

- 주요 진행사항

▸공항대로 배수관(D500㎜) 정비 계획 - 1공구(금호)

▸내    용 : ’17. 12월까지 정비계획 제출

▸공사개요 : D500㎜, L=330m

- 상수도공사 추가구간 통수 계획 - 2공구(진흥), 3-2공구(계룡)

▸내    용 : 11차 통수시설 대상 및 도면 제출(’17.12.12일)

☞ ’18. 1월 통수계획 수립 및 합동점검

- 가곡초길 배수관(D300㎜) 공사 및 통수 일정 - 2공구(진흥)

▸내    용 : ’18. 3월중 상수도 공사 후 통수

- 양천로 배수관(D300㎜) 부설 계획 - 3-1공구(고덕)

▸내    용 : 양천로 상하부 좌우구간별 배수관 부설 계획 제출(’17.12.12일)

▸공사개요 : D300㎜, L=1,050m(’18. 4월 완료)

- 양천로 배수관(D200㎜) 부설(마곡레포츠 앞) - 3-2공구(계룡)

▸내    용 : 시공 상세도면을 수도사업소에 제출, 승인을 받아 시공

▸공사개요 : D200㎜, L=50m

- 서울식물원 내 양천로 우회도로 구간 맨홀 관리 - 3-1공구(고덕), 3-2공구(계룡)

▸서울식물원 내 양천로 우회도로 구간에 설치된 맨홀이 매몰되지 않도록 공구별 담당자가 협의하여 관리

▸상수도 밸브실은 원활한 유지관리를 위해 원형철개(D648)로 시공

- 유량계 및 전기방식시설 설치 - 1공구(금호), 2공구(진흥), 3-1공구(고덕)

▸’18. 4월 설치 완료 및 사업소 기전팀 합동점검 예정

▸상수도사업본부 설치조건 반영(붙임1 참조)

○ 수질민원 반복 발생지역 종합대책 추진(붙임2 참조)

- 등촌동 654-34일대(관세척 ⇨ 단절관 정비 ⇨ 세척갱생관 정비)

- 공항동 658-5일대(배수관 상태검사 ⇨ 배수관 확대 ⇨ 단절관 정비)

- 화곡동 367-72일대(관세척 ⇨ 세척갱생관 정비)

☞ ’18년도 도로굴착 승인 및 예산재배정 요청 필요

○ 유수율 향상 특별합동점검 추진(붙임3 참조)

- 가양1,2동 급수운영 단계별(1~16구간) 노후밸브 중점 정비

- 불용관(단절관) 정비 9개소

○ 시설관리과 공사현황(붙임4 참조)

붙임 : 1. 관계자 회의결과 보고 1부.

2. 수질민원 반복 발생지역 종합대책 1부.

3. 유수율향상 특별합동점검 1부.

4. 시설관리과 공사현황 1부.  끝.

위와 같이 인계ㆍ인수합니다.

2018년 1월 11일

인계자	시설관리팀장	김근용
인수자	주무관	문병희
입회자	주무관	정수용
입회자	시설관리과장	01/05 고신석