- 꿈을 실현하는 창조도시 중구 -
		서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 도로굴착복구공사 건설폐기물처리용역 설계변경 시행(정산)

1. 우리구에서 시행중인 『2017년 도로굴착복구공사 건설폐기물처리용역(연간단가)』에     대하여 아래와 같이 설계변경 시행(정산)코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2017년 도로굴착복구공사 건설폐기물처리용역(연간단가)

나. 용역기간 : 2017. 3.29.~ 2017. 12.20.

다. 도 급 자 : ㈜대길공영 김구회외 1개사

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	121,058,200	91,597,000	감)28,185,200
도 급 비	121,058,200	91,597,000	감)28,185,200

마. 설계변경 사유

- 굴착복구공사 물량감소에 따른 건설폐기물물량 감소로 인한 변경

바. 예산과목

- 도시기반시설확충, 도로굴착복구(도로굴착기금), 도로굴착복구공사,

시설비 및 부대비, 시설비

첨 부 : 1) 설계변경 내역서 1부.

2) 설계변경 보고서 1부.  끝.

주무관							김학준			도로굴착팀장					황인수					도로시설과장					소철호				안전건설국장						12/14 이우룡
협조자				주무관						박윤정					계약팀장							김양심					재무과장							박상우
시행			도로시설과-19484									(	2017.12.14					)		접수											(						)
우	04558					서울특별시 중구 창경궁로 17(예관동) 본관7층															/			http://www.junggu.seoul.kr
전화		3396-6123						/전송			02)3396-8843					/	hjk3210@junggu.seoul.kr												/	대시민공개