- 꿈을 실현하는 창조도시 중구 -
		서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 도로굴착복구공사(연간단가) 설계변경 시행(정산)

1. 우리구에서 시행중인 『2017년 도로굴착복구공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계     변경 시행(정산)코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 도로굴착복구공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2017. 3. 24.~2017. 12. 20.

다. 도 급 자 : ㈜테라칸건설 유인환

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	967,720,500	896,814,850	감)66,418,720
도 급 비	633,550,500	585,200,000	감)48,355,500
관 급 비	193,987,000	220,017,850	증)30,517,780
이 전 비	140,178,000	91,597,000	감)48,581,000

마. 설계변경 사유

- 신규 공종 및 물량 증·감에 따른 설계변경

바. 예산과목

- 도시기반시설확충, 도로굴착복구(도로굴착기금), 도로굴착복구공사, 시설비 및            부대비, 시설비

첨 부 : 1) 설계변경 내역서(정산) 1부.

2) 제비율 검증대장 1부.

3) 설계변경 보고서 1부. 끝.

주무관							김학준			도로굴착팀장					황인수					도로시설과장					소철호				안전건설국장						12/18 이우룡
협조자				주무관						박윤정					계약팀장							김양심					재무과장							박상우
시행			도로시설과-19644									(	2017.12.18					)		접수											(						)
우	04558					서울특별시 중구 창경궁로 17(예관동) 본관7층															/			http://www.junggu.seoul.kr
전화		3396-6123						/전송			02)3396-8843					/	hjk3210@junggu.seoul.kr												/	대시민공개