문서번호	토목과-15167
결재일자	2017.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

지방공업주사		도로조명팀장		토목과장		안전건설교통국장
김학민		정찬재		박주완		12/15 김재겸
협조

★ ◉

- 2017년 가로등 및 기전시설물 정비공사(단가계약) -

설계변경(최종) 보고

2017. 12.

(토목과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

설계변경(최종) 보고

1. 공사개요

○ 공 사 명: 2017년 가로등 및 기전시설물 정비공사(단가계약)

○ 공사개요: 가로등주 정비 등 7종

○ 공사기간: 2017.2.16. ~ 12.31.

○ 도 급 비: 금168,020,000원

○ 도 급 자: 동하시티개발주식회사 대표자 윤종사

2. 설계변경 내용

○ ‘마장 축산물시장 등기구 교체 및 설치’등 가로등 정비물량 증ㆍ감

- 램프 교체(70W 이하): 당초 4개 → 변경33개(증 29)

- 형광등기구 철거(FL30W): 당초 0개 → 변경 52개(증 52)

- 등기구 설치(LED24W): 당초 0개 → 변경 52개(증 52)

- 보안등 설치(LED50W): 당초 0개 → 변경210개(증 210)

- 레이스웨이 설치(Body 70*40mm): 당초 0m → 변경532m(증 532)

- 배관공사(28C(후렉시블)): 당초 0m → 변경 624m(증 624)

- 케이블 설치(CV2.5㎟*2C): 당초 220m → 변경 1550m(감 10)

- 케이블 설치(CV6㎟*1C 2열동시): 당초 5m → 변경 80m(증 75)

○ 보험료(국민건강,연금,노인장기요양) 정산

- 건강보험료: 당초 직노*1.7% → 변경 직노*0%(감 1.7%)

- 연금보험료: 당초 직노*2.49% → 변경 직노*0%(감 2.49%)

- 노인장기요양보험료: 당초 건보*6.55% → 변경 건보*0%(감 6.55%)

3. 변경사유

○ 마장축산물시장 등기구 교체 및 설치: 256개소

⇒ 마장축산물시장 고객센터 집행잔액 활용 보안등 교체 및 추가설치 계획(지역경제과-40493호, ‘17.11.15.)

○ 금남시장 등기구 교체 및 설치: 82개소

⇒ 전통시장 공동시설 설치 사업(시비보조) 변경 추진계획(지역경제과-40315호, ‘17.11.15.)

○ 상원길 가로등주 설치: 15본

⇒ 성수 도시재생 활성화계획에 따른 우리동네 안심길 사업(상원길 포장 및 보도확장) 추진계획(지속가능도시추진단장방침 도시재생과-8704호,‘17.10.20.)

○ 고산자로 등 4개소 이설: 4개소

⇒ 보행자 불편해소를 위한 2017년 횡단보도 확충사업 시행계획(안전건설교통국장 방침 교통행정과-47888호,‘17.8.2.)

○ 독서당로 등주 이설: 2개소

⇒ 5대분야 사망자수 감축을 위한『안전한 지역사회 만들기 모델사업』 실시(안전건설교통국장방침 안전관리과-5228호, ‘17.3.31.)

○ 마장로 33길 가로등 교체 및 신설: 4개소

⇒ 마장축산물시장 적십자 뒤 공영주차장 증설계획(안전건설교통국장 방침 교통지도과-32246호,'17.10.23.)

○ 뚝섬로3길 등주 이설: 1개소

⇒ 뚝섬로3길 도로다이어트 사업 공사 추진계획(안전건설교통국장 방침 토목과-14249호,'17.11.24.)

○ 가로등 시설물 정비공사 물량 증ㆍ감 및 보험료 정산: 1식

⇒ 가로등 시설물정비사항 보고(토목과-12948호,15001호 : ‘17.10/27.,12/12.)

4. 조치계획

○ 공사 물량 증가 설계변경에 따른 도급비 증액 175,974천원은 마장축산물시장 시설현대화 예산 등을 활용하여 설계변경 조치

- 설계변경 내역                                             (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	168,758,000	343,994,280	증) 175,236,280	ㆍ가로등 공사 물량 증ㆍ감 및 사후 보험료정산
도 급 비	168,020,000	343,994,280	증) 175,974,280
관 급 비	-	-	-
이 전 비	738,000	-	감) 738,000

※ 도급비 증액: 마장축산물시장 3,809천원, 금남시장 50,000천원, 상원길 27,313천원, 고산자로 12,000천원, 독서당로 10,000천원, 마장로33길 5,000천원, 뚝섬로3길 4,000천원, 가로등 63,853천원

- 예산과목

· 지역경제과, 지역경제육성, 전통시장 활성화 및 소비자보호, 전통시장 시설현대화 지원, 시설비 및 부대비, 시설비

· 지역경제과, 지역경제육성, 전통시장 활성화 및 소비자보호, 뚝도활어시장 조성지원, 시설비 및 부대비, 시설비

· 도시재생과, 도시재생, 도시재생, 성수 도시재생시범사업(보조), 시설비 및 부대비, 시설비

· 도시교통본부, 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비, 시설비

· 안전관리과, 재해 및 재난예방, 재난예방, 안전관리 및 복구지원, 시설비

· 안전관리과, 편리하고 안전한 도로환경 조성, 보행자 중심의 시설물 관리, 뚝섬로3길 생활권 도로다이어트, 시설비및부대비, 시설비

· 교통지도과, 주차문화개선, 주차환경개선, 공영주차장사업, 시설비 및 부대비, 시설비

· 토목과, 지방도건설 및 확대포장, 도로조명관리, 가로등 및 기전시설물정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 1. 변경 내역서(제3차) 1부
2. 검증 확인서 1부
3. 공사계약 원가심사 결과 통보 공문 1부