국민의 나라 정의로운 대한민국
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	정릉로6가길 44 주변 등 2개소 원형관로 보수공사(굴착) 정산 설계변경 시행

1. 우리구에서 시행중인 『정릉로6가길 44 주변 등 2개소 원형관로 보수공사(굴착)』에 대하여 아래와 같이 정산 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 정릉로6가길 44 주변 등 2개소 원형관로 보수공사(굴착)

나. 공사기간 : ′17. 06. 12. ~ ′17. 12. 31.

다. 계약상대자 : 거승건설(주) 대표 한영주

라. 계약금액 : 금414,512,290원(금사억일천사백오십일만이천이백구십원정)

마. 예산과목

- 물순환안전국 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로 보수보강, 정릉로6가길 44 주변 원형관로 보수, 시설비 및 부대비, 시설비

- 물순환안전국 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로 보수보강, 지봉로20길 17 주변 원형관로 보수, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 설계변경 사유 : 계약물량 변동 및 신규공종 발생

사. 설계변경 내용 : 공원, 지하철출입구 등 지장물로 인한 하수관로 보수공사 불가구간 제외 및 차량과 보행자 안전을 위한 도로시설물 개선에 따른 물량변경 등

아. 설계변경 금액

단위:원

구 분	변경 전	변경 후	증 · 감액
총 공 사 비	626,068,290	700,000,000	증)	73,931,710
도 급 비	414,512,290	448,800,000	증)	34,287,710
관 급 비	121,000,000	148,642,010	증)	27,642,010
이 전 비	46,804,000	24,523,990	감)	-22,280,010
폐기물처리비	43,752,000	78,034,000	증)	34,282,000

붙임 1) 설계변경 내역서 1부.

2) 설계변경 사유서 1부.

3) 사업추진계획 보고서 1부.

4) 계약금액 조정검증표 1부.  끝.

주무관	박종현		하수담당	김익기		치수과장	송기민		안전건설교통국장	12/06 代이상수
협조자	계약담당	이환규		재무과장	김영임
시행	치수과-21199	(		)	접수		(		)
우	02848	서울 성북구 보문로 168 10층 치수과	/	http://www.seongbuk.go.kr
전화	02-2241-3632	/전송	02-2241-6563	/	pjh03160@sbmail.go.kr	/	대시민공개