문서번호	도시철도설비부-352
결재일자	2018.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
박지영		서태창	01/11 구자훈
협조

제1차 9호선 3단계 건설공사 공정관리 T/F팀 회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 1.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

지하철 9호선 3단계 건설공사

공정관리 T/F팀 회의 결과보고

서울지하철 9호선 3단계 시스템 분야 철도종합시험운행을 위한 공정관리 및 타 분야와의 원활한 인터페이스를 위하여 공정관리 T/F팀 회의 개최결과를 보고 드림

□ 회의개요

○ 일  시 : 2018. 1. 9.(화) 14:00~15:00

○ 장  소 : 도시철도설비부 회의실

○ 참석자 : 6명

- 팀 장 : 시설전기과장 서태창

- 담 당 : 시설전기과 박지영, 차량과 이재돈, 설비공사과 허웅,

정보통신과 박규영, 신호과 김동일

□ 회의 안건

○ ‘17년 공정관리 추진사항 확인

○ ‘18년 공정관리 추진계획 확인 및 지연 공정에 대한 대책 강구

□ 회의결과

○ ‘17년도 공정관리 추진사항 확인

- PSD 설치 및 마감 완료(설비공사)

- 전기실 수전완료 및 역사 전력공급완료(시설전기)

- 변전실 SCADA 시험완료(송변전)

- 전차선 설치 및 내, 가압시험 완료(송변전)

- 전송설비 설치 및 개통완료(통신)

- 열차무선/복합통신 설치 및 시험완료(통신)

- 신호설비 설치 및 개별 연동완료(신호) 등

○ ‘18년도 공정관리 추진계획 확인

- 별첨 “전공구 MILE STONE 공정표” 확인

- 933정거장 #1번 출입구 토목공정 지연으로 E/V 설치 지연(6.30 설치완료 예정) 및 E/S 설치완료 예정일 변경(7.20 → 6.30)

□ 건의사항 및 조치결과

○ 건의사항

- 송풍기 시운전(‘18.4. 1 예정) 이전에 풍도에 대한 청소를 실시하지 않으면 환풍구를 통해 먼지가 보도로 비산되어 민원발생 우려되므로 풍도 청소실시

○ 조치사항

- 송풍기 시운전 이전에 풍도 청소시행

- 각 공구 풍도청소 일정(2018년 상반기)

공 구	918	919	920	921	922	923
일 정	3.19~3.30	2.28~3.31	3.5~3.30	3.10~3.29	3.15~3.30	2.28~3.30

따로붙임 : 1. 3단계 전공구 MILE STONE 공정표 1부.

2. 9호선 3단계 공구별 공정관리 현황 1부. 끝.