문서번호	조경과-493
결재일자	2018.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경관리팀장	조경과장
변동풍		송동명	전결 01/11 문길동
협조

2017년 가로변 녹지량 확충사업 추진결과 보고

푸른도시국

(조경과)

2017년 가로변 녹지량 확충사업 추진결과 보고

가로변 유휴공간의 녹지조성 및 정비를 위한 「2017년 가로변 녹지량 확충사업 」의 추진결과를 보고합니다.

1		사업개요

❍ 대    상: 중구 장충단로(장충동2가 199-4일대) 등 30개소

❍ 규    모: 44,670㎡

❍ 사업기간: 2017. 1. ~ 12.

❍ 사업내용: 가로변 유휴공간 녹지 조성 및 정비

❍ 사 업 비: 3,224백만원(시설비 3,221, 시설부대비 3)

2		2017년 사업 추진내용

	<중점 추진사항>
‣ 가로변 유휴공간(중앙분리대, 안전지대, 가로녹지 등)에 녹지 조성 ‣ 빗물이 유입될 수 있도록 빗물유입 화단 조성 ‣ 가로숲 조성 및 의자 설치로 휴식공간 조성 ‣ 단풍과 열매, 꽃 등이 아름다운 수종 도입

❍ 녹지조성(정비)

(단위 : m, ㎡)

개 소	합 계		조 성		정 비
	연장	면적	연장	면적	연장	면적
30	8,552	44,670	722	1,924	7,830	42,746

※ 추진실적 세부내역은 [붙임1] 첨부

○ 수목 및 초화류 식재

수 목			초화류(본)	식생매트 (㎡)
합 계	교 목(주)	관 목(주)
68,278	405	67,873	206,873	1,296

○ 편의시설

파고라(동)	앉은벽(m)	의 자(조)
1	-	33

❍ 잘된 점

- 서울형 공공조경가 그룹의 설계심의 참여로 설계 수준 향상(자문 14건)

- 유휴공지에 활용하여 편의시설(파고라 1동, 의자 33조) 설치로 휴게공간 마련

- 가로녹지 관수시설(중구 장충단로, 성동구 아차산로) 도입으로 가뭄피해 예방

❍ 미흡한 점

- 공사가 대부분 봄철 보다 가을 시행(상반기 2건, 하반기 13건)

❍ 개선할 점

- 설계심의 자문결과 반영 여부 점검(단계별 자체점검 및 준공보고시 사진 제출)

- 조기에 설계하고 시공토록 설계도서 작성비 사전 재배정

- 가로녹지의 대형수목 아래 견딜 수 있는 하층식재 도입 필요

3		예산집행

(단위 : 천원)

과목	예산현액	집 행 액	사고이월	집행잔액	집 행 율	비 고
합 계	3,224,000	2,752,820	222,285	248,895	92%
시설비	3,221,000	2,749,820	222,285	248,895
부대비	3,000	3,000	-	-

▸사고이월 : 중구 장춘단로(100,000천원), 은평구 증산로(122,285천원)

4		2018년 중점 추진사항

❍ 서울형 공공조경가 그룹의 설계심의 참여로 설계 수준 향상

❍ 빗물이 유입될 수 있도록 빗물유입 화단 조성

❍ 가로숲 조성 및 의자 설치로 휴식공간 조성

❍ 하층식생이 빈약한 가로녹지에 식생 및 편의시설 개선

붙임 1. 2017년 가로변 녹지량 확충사업 추진실적 1부.

2. 2017년 추진실적 사진 1부.  끝.