문서번호	도로관리과-540
결재일자	2018.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도로굴착관리팀장	도로관리과장
엄태용		김근용	01/11 박문희
협조
	주무관		최현

동공탐사용역 공정회의(12월) 결과 보고

2018. 1.

안전총괄본부

도로관리과

동공탐사용역 공정회의(12월) 결과 보고

□ 회의개요

○ 일    시 : ’18. 1. 9.(화) 14:30 ~ 16:00

○ 장    소 : 도로관리과 회의실

○ 안    건 : 2017년 2단계, 3단계 월간보고

○ 참    석 : 도로관리과장, 도로굴착관리팀장, 업무담당 2명

(업체) 지케이엔지니어링(17-2), 광성지엠(17-3)

□ 추진실적

○ 탐사실적(’17.12.31 기준)

구분	계획연장	탐사연장	분석연장	분석동공	제척(GPR)	천공	동공발견	적중률 (미달포함)
계	2,061㎞	2,003㎞	1,906㎞	1,695	357	1,274	1,073	84.2% (90.9%)
1단계	981㎞	981㎞	981㎞	794	129	665	546	82.1% (90.1%)
2단계	614㎞	614㎞	614㎞	439	43	396	337	85.1% (88.1%)
3단계	466㎞	262㎞	149㎞	462	185	213	190	89.2% (98.6%)

□ 공정회의 주요내용

○ 2단계 추진실적 관련

- 준공전 최종보고회 준비

- 동공, 비동공 등 파형 및 유형을 구분하여 보고서 수록

○ 3단계 추진실적 관련

- 서초구 탐사구간에서 동공이 많이 발생한 사유 검토 반영

- 천공작업시 굴착깊이가 깊은 경우 지하매설물 주의

- 흙의 유실속도 시험은 동절기임을 고려하여 일정 수립

- 천공작업시 천공수 처리 등 동절기 현장관리 철저

- 보호차량 및 작업구간 사이 안전거리 확보 및 신호수 별도 배치

별도 : 보고자료 2건(출력물) 별도.  끝.