문서번호	도시철도토목부-481
결재일자	2018.1.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
김근수		최진규	01/11 이도헌
협 조
	주무관			최경호
	주무관			조태현

『9호선 3단계 궤도공사(1공구) 감독권한대행 등 건설사업관리용역』

설계변경 검토보고

2018. 01.

도시기반시설본부

(도시철도 토목부)

「9호선 3단계 궤도공사(1공구) 감독권한대행 등 건설사업관리용역」

설계변경 검토 보고 (2차 1회 최종정산)

『서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구) 감독권한대행 등 건설사업관리용역』관련 건설사업관리기술자 배치계획 조정에 따른 설계변경 검토 보고임.

※ 철도1부(현장) 2018-31호(2018.01.02.) 계약금액(2차) 변경 요청

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구) 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 구    간 : 송파구 잠실동(종합운동장역)~ 송파구 방이동(올림픽공원 남4문)

○ 규    모 : 궤도부설 9.482km(단선, 콘크리트도상), 분기기 부설 11틀

○ 용역기간 : 2016.09.01. ~ 2018.01.31.

○ 계약금액 : 933,972,000원

○ 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링, ㈜대건엔지니어링

□ 계약현황

구 분	총 차	1차	2차
용역기간	‘16.09.01~‘18.01.31	‘16.09.01~‘16.12.31	‘17.01.01~‘18.01.31
용역금액(원)	933,972,000	160,000,000	773,972,000

□ 계약상대자 보고내용

○ 공사 추진에 따라 상주기술자 투입을 조정하여 계약금액 감액(2차계약)

※ 2차 계약 : 당초 55.9인/월 ⇒ 변경 54.9인/월

□ 설계변경 검토금액

구 분		총 차	1차	2차
용역금액(원)	당초	933,972,000	160,000,000	773,972,000
	변경	921,931,000	160,000,000	761,931,000
	증·감	감12,041,000	-	감12,041,000
용역기간	변경 없음	‘16.09.01. ～ ‘18.01.31.	‘16.09.01. ～ ‘16.12.31.	‘17.01.01. ～ ‘18.01.31.

□ 변경 검토내용

○ 건설사업관리기술자 배치 조정                           (단위: 인/월)

구분	총차		2016년 (1차)		2017년 (2차)		비고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
책임 기술자(고급)	17.0	17.0	4.0	4.0	13.0	13.0
분야별 기술자(중급)	25.4	25.0	3.9	3.9	21.5	21.1	감0.4
분야별 기술자(초급)	19.2	18.6	2.4	2.4	16.8	16.2	감0.6
소 계	61.6	60.6	10.3	10.3	51.3	50.3	감1.0
기술지원기술자 (궤도, 특급)	3.2	3.2	0.7	0.7	2.5	2.5
기술지원기술자 (안전, 고급)	2.7	2.7	0.6	0.6	2.1	2.1
소 계	5.9	5.9	1.3	1.3	4.6	4.6
합 계	67.5	66.5	11.6	11.6	55.9	54.9	감1.0

□ 조치계획

○ 상기의 계약상대자 제출 내용과 같이 “서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구) 감독권한대행 등 건설사업관리용역”의 설계변경(정산)을 시행하고, 계약부서(건설총괄부)에 변경내용을 통보하고자 함.

붙임 : 관련공문 1부.  끝.