	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	동절기 공사 임시중단에 따른 감리원 인력투입 조정 지시

1. 귀 기관의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2. 귀 사와 우리 사업소간 계약 체결하여 시행중에 있는 「사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)」과 관련 시공품질 확보 및 안전사고 예방 등을 위하여 동절기 공사를 임시 중단하니 2018년 2월말까지 당해 현장의 감리원 인력투입을 조정하여 건설사업관리단을 축소 운영하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 시공 중단에 따른 안전사고 및 민원 등이 발생하지 않도록 현장 관리에 철저를 기하여 주시고, 2018년 3월 이후 공사 재개를 위한 사전준비 등 사업추진에 만전을 기하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	한국건설관리공사,(주)대한콘설탄트
주무관	이동섭		주무관	김종성		시설보수과장	01/12 신동헌
협조자
시행	시설보수과-331	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	02-300-8374	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	대시민공개