문서번호	시설관리과-792
결재일자	2018.1.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
이생기		01/12 박은선
협 조
	주무관			이승우
	주무관			박홍
	주무관			윤복철
	주무관			박문창

설계변경(4차) 심의개최 결과보고

【2017년 서초·강남구관내 긴급누수복구공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 1.

강남수도사업소

(시설관리과)

설계변경(4차) 심의 의견서

공사명 : 2017년 서초․강남구관내 긴급누수복구공사(장기계속공사)

신청부서명	시설관리과
*******	*****
제출년월일	2018. 1. 12.

심의 의원회 의견

심의일시 : 2018. 1. 12.(금) 15 : 00

심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과를 아래와 같이 의견을 제시함.

구 분	직 위	성 명	심의의견	비 고
위 원 장	시설관리과장	*****	***
위 원	주무관	*****	***
위 원	주무관	******	***
위 원	주무관	*****	***
위 원	주무관	*****	***
간 사	주무관	*****	***

설계변경 사유서

공사현황

❍ 공 사 명 : 2017년 서초․강남구 관내 상수도긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

❍ 공사개요 : 당초- 누수복구 1,200개소, 불용관,인입관정비 400개소

변경- 누수복구 1,200개소, 불용관,인입관정비 400개소

❍ 공사기간 : 2017. 4. 10. ~ 2018. 6. 30.

❍ 도 급 비 : 당초 – 금1,595,793,400원

변경 – 금1,595,793,400원

❍ 도 급 자 : ***************

설계변경 사유

❍ 본 공사의 현장여건 변동에 따라 신규공종 발생 및 계약물량 증․감사항 발생

❍ 세부 변경내용

- 계약물량 증가 : 콘크리트포장깨기(굴삭기(타이어)0.18㎥누수)불용외 53종

- 계약물량 감소 : 아스팔트 포장절단 (100~150mm,누수(주간),불용)외 151종

- 신공종 발생 :  터파기(기계100%)불량(누수)굴삭기(타이어) 0.6㎥)불용외 18종

- 사급자재 물량 변경 : 주름마디 스테인레스강관((D=15㎜))외 80종

설계변경 금액 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	비 고
총부기금액	*************	*************	*

따로붙임 : 1. 설계변경(4차)내역서 1부.  끝.