문서번호	설비부-18360
결재일자	2017.11.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박기범		임현근	11/01 권오식
협조

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사』

설계변경 검토보고(총차2회, 2차1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사』

설계변경 검토보고(총차2회, 2차1회)

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 전기공사』관련 건설사업관리기술단에서 제출한, 유관기관 요청사항 및 현장여건을 반영한 설계변경(총차,2차) 건에 대하여 검토 보고함

1		공사현황

▢ 공 사 명 : 도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사

▢ 공사규모 : 연결램프(L=533m, B=5~6m)

가로등 및 신호등 이설 / 램프구간 가로등, 점검등 신설

▢ 공사기간 : 2015. 2. 27. ~ 2017. 12. 29.

(2차: 2017. 3. 07. ~ 2017. 12. 29.)

▢ 공 사 비 : 212백만원(도급 206백만원, 관급 5백만원, 이전비 1백만원)

▢ 감 리 단 : 극동엔지니어링㈜ 외 1개사

▢ 시 공 사 : ㈜성강통신기술사사무소

2		관련근거

▢ 실정보고 승인 통보

- 설비부-5040호 (2017. 3. 28.) : 가로등 설비공사

- 설비부-15668호 (2017. 9. 13.) : 가로등, 교량점검등, 승강기 전기 인입공사

▢ 설계변경 자문회의(소위원회) 지적사항에 대한 조치결과 제출

- 극감정릉 제17-194호 (2017. 10. 27.)

▢ 설계변경 도서제출

- 극동(감리) 제17-1260호 (2017. 10. 31.)

3		설계변경 검토사항

▢ 설계변경 사유

○ 실정보고 승인사항 반영: 유관기관 요청사항 및 현장여건 반영

○ 설계변경 소위원회 자문회의 조치결과 반영

- 심의일자: 2017. 10. 12. (목)

- 심의내용: 도원교통 진입로 구간 가로등 4본 신설 외 6건

- 실의결과

구 분	심의금액	조정금액	증․감액	비 고
설계변경 소위원회 자문회의	**********	**********	***********

▢ 설계변경 내용

공 종	설계변경 내용		변경사유	증․감액
가로등 설비공사	1. 도원교통 진입로 구간 가로등 4본 신설		(성북구청 요청사항) 도원교통 진입로 버스운행의 안전성 확보	**********
	2. 기존 가로등 이설 2본 신호 통합주 가로등 2개소 신설		현장여건 고려하여 설계반영	*********
	3. 정릉로104-14 부근 보안등 3본 신설		(성북구청 요청사항) 야간보행에 불편함이 없도록 조치	*********
	4. 육교 보안등기구 LED로 교체 7개소		(성북구청 요청사항) 조명기구 교체를 통해 야간보행에 불쳔함이 없도록 조치	*********
	당초	무전극램프 보안등
	변경	LED보안등 25W
	5. 진입램프구간 가로등설비 자재사양 변경		(서울시설공단 요청사항) 유지관리 용이성 고려	*********
	당초	-분체도장 가로등주 -가로등 분전함: 단방향 점멸기
	변경	-용융아연도금 등주 -가로등 분전함: 단방향+양방향 점멸기
교량점검등 설비공사	6. 교량점검등 및 전열 회로분리		(서울시설공단 요청사항) 유지관리 안전성 고려	*******
엘리베이터 인입 전기공사	7. 엘리베이터 신설로 인한 전기인입공사		(성북구청 요청사항) 민원요청에 인한 시설추가	**********
직접공사비				**********
제 경 비				**********
부가가치세				*********
합 계				**********

▢ 설계변경 현황(총차, 2차)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고 (증·감)
총 차
공사기간	2015. 02. 27.~ 2017. 12. 29.	2015. 02. 27. ~ 2017. 12. 29.	변경없음
도 급 비	***********	***********	**********
2 차
공사기간	2017. 03. 07.~ 2017. 12. 29.	2017. 03. 07. ~ 2017. 12. 29.	변경없음
도 급 비	***********	***********	**********

▢ 감리원 검토 의견

- 기 실정보고 승인사항에 대하여 설계변경 자문회의(소위원회) 지적사항을 반영하여, 도급공사비를 조정한 내용으로 검토결과 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		보고자 의견

▢ 책임감리원의 설계변경 검토내용이 적합한 것으로 판단되어, 설계변경(총차2회, 2차1회) 계약을 의뢰하고자 함.

붙  임  1. 건설사업관리기술단 공문 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.