문서번호	도로관리과-663
결재일자	2018.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로포장안전팀장	도로관리과장
김종민	임영철	01/12 박문희

「절삭 폐아스콘 처리단가 원가분석 용역」

준공기한 연기 검토보고

2018. 1.

안전총괄본부

(도로관리과)

「절삭 폐아스콘 처리단가 원가분석 용역」

준공기한 연기 검토보고

「절삭 폐아스팔트콘크리트 처리단가 원가분석 용역」수행과 관련하여 자문회의 개최 후 검토·반영에 필요한 소요기간을 고려한바 과업의 절대공기 부족으로 이에 대한 준공기한 연기를 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 절삭 폐아스팔트콘크리트 처리단가 원가분석 용역

○ 용역기간 : ’17.12.01.~’18.01.14.(45일)

○ 용 역 비 : 14,550,000원

○ 용역업체 : (사)동양경제정보연구소

○ 용역내용

- 절삭 폐아스팔트콘크리트 배출 및 처리현황 분석

- 절삭 폐아스팔트콘크리트 톤당 처리단가 산정

□ 추진경위

○ ’17.11.29. : 용역 계약체결 통보(재무과 → 도로관리과)

○ ’17.12.08. : 용역 착수보고회 개최

○ ’17.12.11. : 처리업체(12개사) 현장 방문조사 실시

○ ’17.12.28. : 용역 1차 중간보고회 개최

○ ’18.01.08. : 외부전문가 초빙 자문회의 개최

○ ’18.01.11. : 용역 2차 중간보고회 개최

□ 검토내용

○ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	’17.12.01.～’18.01.14.(45일)	’17.12.01.～’18.01.29.(60일)	15일 연장
용 역 비	￦14,550,000	￦14,550,000	변경 없음

○ 연기사유

- 건설폐기물 처리단가 원가분석 용역 특성상 절삭 폐아스콘 처리업체의 협조가 절대적으로 필요하여 지속적으로 협조 요청하였음에도 불구하고 처리업체의 설문자료 제출 거부 등으로 과업이 지연되었으며,

- 1차 중간보고회 이후 원가분석 및 건설폐기물 처리 관련 외부전문가를 초빙하여 자문회의 개최 후, 과업 결과물 도출에 자문위원 의견 보완 등의 추가기간이 소요되어 이에 따른 준공기한 연기 필요

○ 귀책사유 및 지체상금 부과여부

- 귀책사유 : 서울특별시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 처리의견

○「절삭 폐아스팔트콘크리트 처리단가 원가분석 용역」준공 기한을 연기하고, 관련 분야 외부전문가 자문의견을 반영하여 내실 있는 과업이 진행될 수 있도록 용역 시행에 만전을 기하고자 함

붙임 : 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.  끝.