투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	노들섬 변경설계 관련 명확한 기준에 의한 '공사한계' 적용 지시

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원드리며, 우리 본부에서 시행하는「노들섬 특화공간조성사업」의 오수처리방식 변경설계와 관련입니다.

2. 관련 시방서 등에 공종별로「공사한계’(시공주체)」가 명확히 규정되어 있음에도 불구하고 자의적 해석으로 인해 불필요한 논란이 야기되고 있는 만큼, 아래와 같이 명확한 기준에 따라 타당성 있는 조치가 취해질 수 있도록 설계변경 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 관련근거:「노들섬 공사시방서」및「서울시특별시 전문시방서」_건축기계설비편 ‘공사한계’(관련페이지: M01000-14, M01000-59)

나. 설계변경 주요내용

- 변경내용: 자체 오수처리시설 ➔ 한강대교 종단 이송관로 설치

- 변경사유: 다중이용 복합시설로써 악취발생 억제의 최우선 및 유지관리 용이

다. 조치사항: 신규 추가공정에 대해 관련기준에 따라 타당성 있는 ‘공사한계’ 적용

- 기계분야 ‘공사한계’ ⇒ 건축물 외벽에서 1M까지의 우·오수배관공사(옥내)

- 토목분야 ‘공사한계’ ⇒ 기계시공부분 이후부터의 우·오수배관공사(옥외)

※ 기계설비공사는 ‘옥내’의 냉난방, 급배수, 공조설비 등이 주공정으로 우·오수 배관의 경우 건물외벽에서 1M까지의 공사로 한정되어 있음.

붙임  ‘공사한계’_노들섬 공사시방서(발췌) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)토포스건축사사무소 박남규 소장 귀하,(주)엠엠케이플러스 김지훈 소장 귀하
주무관	김인호		열빛총괄과장	유병기		설비부장	전결 01/15 권오식
협조자
시행	설비부-521	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	ijhw21@seoul.go.kr	/	대시민공개