문서번호	역사도심재생과-589
결재일자	2018.1.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도심계획팀장	역사도심재생과장
김미애		代임성근	01/15 양병현
협조

준공기한 연기 보고

(필동 교통영향평가 및 환경영향평가 용역)

2018. 1.

준공기한 연기 보고

(필동 교통영향평가 및 환경영향평가 용역)

필동 지구단위계획 수립 용역 지연됨에 따라 교통영향평가 심의 및 환경영향평가 협의 수행 지연에 따른 준공기한을 연기하고자 함

Ⅰ		용역개요

○ 용역건명 : 필동 지구단위계획 수립 관련 교통영향평가 및 환경영향평가 용역

○ 과업기간 : 2017. 3. 14. ~ 2018. 1. 16.

○ 계약금액 : 64,874,000원(금육천사백팔십칠만사천원정)

○ 계약업체 : ********

○ 과업내용 : 「필동 일대 지구단위계획」결정에 따른 교통 및 환경 변화를 예측하고 교통상의 장애 등 제반 교통, 환경 문제에 미치는 영향을 검토·분석하여 개선대책 수립

Ⅱ		추진현황

○ 2017. 3. 14. : 계약체결

○ 2017. 3. 17. : 용역착수

○ 2017. 3. ~ : 기초자료 조사 등

Ⅲ		변경내역

○ 준공기한

- 당초 : 2018. 1. 16.

- 변경 : 2018. 10. 5.

○ 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

○ 연기사유

- 필동 일대 지구단위계획(안) 마련이 선행되어야 교통영향평가 심의 및 환경영향평가 협의 수행이 가능한 사항으로 2017년 대통령 선거로 인한 주민의견수렴 절차 중단 등으로 주민의견 수렴 지연되어 지구단위계획 과업기간 기 연장함.[재무과-49169(2017.10.11.)]

- 이에 따라 지구단위계획 용역 연장기간에 맞춰 추가 과업기간이 필요하므로 위와 같이 용역 준공기한을 연기하고자 함.

Ⅳ		향후계획

○ 준공기한 연기 의뢰 : 재무과.

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 연장공문, 합의각서 및 변경공정표 각 1부.  끝.