문서번호	급수운영과-981
결재일자	2018.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
제영도		박희철	01/17 최규해
협 조
	시설관리과장			박은선
	주무관			강희창

2018년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

2018.  1.

강남수도사업소

2018년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

건강하고 맛있는 아리수를 단수 또는 정체없이 공급하기 위한 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ	사 업 개 요

□  추진근거

□ 2018년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획 알림『누수방지과-532호(2018.1.16.)』

□  사업기간 : 2014년 ~ 2022년

□  사 업 비 : 4,504백만원

□  정비대상 : 90개소

□  사업목적

□ 단일배관 이중화 : 고립지역의 단일배관을 이중화하여 단수없는 누수복구 체계 구축

□ 단절관 순환관망 : 관말 정체수 발생지점에 순환 배관망을 형성하여 수질저하 방지

Ⅱ	세부 추진계획

□  추진실적 및 계획

구 분		총계	추진 실적					추진계획
			소계	’14년	’15년	’16년	’17년	소계	’18년	’19년 이후
계	사업비 (백만원)	4,504	998	234	278	230	256	3,506	706	2,800
	대상(건)	90	36	22	7	5	2	54	28	26
	연장(m)	4,510	1,278	347	321	290	320	3,232	767	2,465
단일 배관 이중화	사업비 (백만원)	412	412	-	130	130	152	-	-	-
	대상(건)	3	3	-	1	1	1	-	-	-
	연장(m)	450	450	-	130	130	190	-	-	-
단절관 순환 관망	사업비 (백만원)	4,092	586	234	148	100	104	3,506	706	2,800
	대상(건)	87	33	22	6	4	1	54	28	26
	연장(m)	4,060	828	347	191	160	130	3,232	767	2,465

□  2018년 추진계획

□ 추진기간 : 2018.3.1. ~ 11.30.

□ 추진대상

- 규 모 : 28개소, D=80~300㎜, L=767m

- 예 산 : 706백만원

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(소블록배급수관망개선)

□ 사업구분

- 단절관 순환관망

▴ 사업효과 : 관말 정체수 제거로 수돗물 수질 향상에 기여

연번	공사위치	공사개요		소요예산 (천원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계	28건	80~300	767	705,700
1	강남구 논현1동 280-20	80	5	5,000	급수운영과
2	강남구 논현2동 279-107	100	15	15,000	〃
3	강남구 논현2동 279-146	80	10	10,000	〃
4	강남구 논현2동 279-48	80	3	3,000	〃
5	강남구 대치동 991-10	80	10	10,000	〃
6	강남구 대치동 991-11	80	10	10,000	〃
7	강남구 도곡동 190-5	150	20	20,000	〃
8	강남구 도곡동 420~420-1	100	15	15,000	〃
9	강남구 삼성동 140-30~140-25	200	70	63,000	〃
10	강남구 삼성동 76-31~76-31	80	15	10,500	〃
11	강남구 세곡동 360-18~348-1	100(80)	125	125,000	〃
12	강남구 신사동 521-2~519-1	100	15	12,000	〃
13	강남구 신사동 571~571	100	10	8,000	〃
14	강남구 신사동 588-21~588-21	300	10	9,600	〃
15	강남구 신사동 598-1~598-1	200	35	31,500	〃
16	강남구 청담동 72-6~72-6	80	15	10,500	〃
17	강남구 청담동 98-8~98-8	200	20	18,000	〃
18	서초구 반포동 107-56~108-6	100	15	11,000	시설관리과
19	서초구 반포동 704-3~703-2	80	26	19,000	〃
20	서초구 반포동 718-9~718-9	100	10	7,000	〃
21	서초구 반포동 721-17~724-4	150	12	10,000	〃
22	서초구 반포동 88-6~88-5	150	28	25,000	〃
23	서초구 방배동 2104	80	6	4,000	〃
24	서초구 방배동 449-7~449-6	80	33	23,000	〃
25	서초구 방배동 476-3	100	8	5,600	〃
26	서초구 방배동 757-1	200	8	7,000	〃
27	서초구 방배동 967-44	300	6	6,000	〃
28	서초구 방배동 990-1~190-1	200	212	212,000	〃

□ 추진방법

- 장기계속단가계약공사 시행 : 상수도공사 3건(급수운영과 2건, 시설관리과 1건)

▴ 건별 소규모 공사이고 정비대상이 산재되어, 연간단가계약공사로 시행

▴ 공사명 : 2017년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약) 등 3건

□ 세부 추진일정

- 2018. 3월 ~ 4월 : 현장조사 및 도로굴착 협의

- 2018. 5월 ~ 9월 : 작업지시(장기계속단가계약공사)

- 2018. 10월 ~ 11월 : 공사완료

Ⅲ	행정사항

□  도로굴착 협의 등 공사시행을 위한 사전준비 철저

□  담당자별 세부 정비 일정을 급수운영과에 제출(3월 31일까지)

□  월별 추진실적 제출(붙임2 : 본부 누수방지과 매월 10일)

□  공사완료 후 급수운영과에 준공사항(공사개요, 위치도 등) 제출

붙임 : 1. 2018년 소블록 배급수관망 정비 대상 1부.

2. 월보 양식 1부.  끝.