문서번호	버스정책과-1550
결재일자	2018.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	정류소관리팀장		버스정책과장		교통기획관		도시교통본부장
강설영	이희신		김정윤		여장권		01/17 고홍석
협 조

2018년 가로변정류소 이용환경 개선사업 추진계획

2018. 1.

도시교통본부

(버스정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2018년 가로변정류소 이용환경 개선사업 추진계획

휠체어 이용자 등 교통약자 뿐만 아니라 일반시민 모두가 편리하게 이용할 수 있는 무장애정류소 확대 설치로 시내버스정류소 이용환경 개선을 통한 대중교통 이용시민의 편의를 제고하고자 함

1		추진배경 및 근거

□ 추진배경

○ 편의시설 미설치 정류소에 대한 개선 요구 증대

- 승차대, 버스정보안내단말기(BIT) 등 미설치 정류소에 대한 형평성 문제

- 보도폭 협소 및 상가가림 등으로 편의시설 미설치 가로변정류소(약 2,970개소) 개선 필요

○ 교통약자의 이동권 보장을 위한 저상버스 도입확대에 따라 저상버스 이용 시 교통약자의 승․하차 불편해소

- 정류소 주변 보도시설물 정비 등 정류소 이용환경 개선을 통한 접근성 향상

□ 추진근거

○ 법령상 근거

- 교통약자이동편의증진법(제14조)

- 서울특별시 교통약자이동편의증진에 관한 조례(제9조)

○ 시장 공약(’14. 5. 20.)

- “시민의 삶을 바꾸는, 시민의 마음을 쏙 빼앗기 위한 작은 공약” 101개 프러포즈

‧ 예술이 되는 매력적인 버스정류장! (혁신-43)

※ 시민공약평가단 심의를 통해 공약목표 변경 : 당초 55개소 → 7개소

‧ 무장애(Barrier-Free) 버스정류소 (혁신-45)

2		사업개요

□ 사업기간 : ’15. 1.~’18. 12.

□ 사업규모 : 총 144개소(무장애정류소 109, 디자인승차대 7, 승차대 28)

구분	합계	2015년	2016년	2017년	2018년
무장애정류소	109개소 (51.2억)	17(7.4억)	40(20억)	30(15억)	22(8.8억)
디자인승차대	7개소 (7억)	2(2억)	5(5억)	-	-
버스 승차대	28개소 (7.2억)	14(3억) 서초구	-	-	14(4.2억) 송파구

※ 주민참여 예산(3개구) : 중구(1억), 동대문(2.2억), 송파구(0.8억) 재배정

□ 총사업비 : 6,540백만원

□ 무장애정류소 사업내용

○ 서울시 표준형 승차대, 버스정보안내단말기, 라운드경계석 및 휠체어대기공간

○ 승하차 구간 지장물 제거, 점자블록 설치

승차대	라운드경계석	휠체어대기공간	알뜰BIT

3		2017년 추진사항

□ 사업내용

○ 무장애정류소 설치 : 30개소(15억)

□ 추진내용

○ ’17년 사업 추진계획 방침	: ’16. 12. 29.

○ 무장애정류소 사업후보지 자치구 추천(총 47개소)  : ’17. 1.~2월

- 미추천 자치구(3개구) : 강북, 도봉, 서초

○ 실시설계용역 시행	: ’17. 3. 30.~7. 14.

- 현장여건 등 설치 가능성 조사 55개소

○ 설계내역서 검토·보완(공사비 적정여부 등)	: ’17. 7. 15.~8. 23.

○ 토목공사계약심사(30개소)	: ’17. 8. 22.~9. 21.

○ 물품(버스승차대)계약심사	: ’17. 10. 11.~11. 15.

○ 계약의뢰 및 계약체결	: ’17. 11. 1.~12. 28.

- 토목공사, 전기공사, 승차대 제작설치, 폐기물처리용역 등

※ ’17년 사업 사고이월 : 사업 지연으로 사고이월[공사기간 : ’18. 3.~6월]

‣ ’17년 예산 집행액 : 186백만원

‣ 사고이월액 : 1,079백만원

4		2018년 추진계획

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2018년 가로변정류소 이용환경 개선사업

○ 사업기간 : ’18. 1.~12월

○ 사업규모 : 무장애정류소 22개소 및 송파구 버스승차대 14개소 설치

※ 송파구 버스승차대 설치 규모는 자치구와 협의, 확정

○ 사 업 비 : 1,300백만원

- 무장애정류소 : 22개소 × 40백만원 = 880백만원

- 송파구 버스승차대 : 14개소 × 30백만원 = 420백만원

□ 추진절차 및 대상지 선정

○ 추진절차

- 대상지 추천 요청(자치구) 및 대상지 선정(버스정책과) → 기술용역 타당성심사(기술심사담당관) → 실시설계용역 계약체결(재무과) 및 용역시행(버스정책과) → 공사 및 물품 계약심사(계약심사과) → 공사, 물품 계약체결(재무과) → 공사시행 및 준공(버스정책과)

○ 대상지 추천 및 선정

- 대상지 추천 : 22개구 총 67개소 접수

종로	중구	용산	성동	광진	동대문	중랑	성북	강북	도봉	노원	은평	서대문
2	2	3	3	2	4	5	5	미추천	3	3	2	미추천
마포	양천	강서	구로	금천	영등포	동작	관악	서초	강남	송파	강동	계
4	6	미추천	3	2	2	2	2	3	3	3	3	67

- 대상지 선정 : 선정기준에 의거 최종 22개소 선정

· 선정기준 : 구별 형평성, 저상버스운행대수, 승하차 이용수요 등 고려, 구에서 추천한 우선순위로 결정(대상지 별첨)

※ 선정 제외 대상 : 버스승차대 설치 예산 별도 확보된 송파구 제외

- 실시설계 과정에서 지장물 등 현장여건으로 사업시행 곤란 시 추가 대상지로 변경

□ 추진일정

○ ’18년 사업대상지 추천(자치구)	: ’17. 12. 28.

○ ’18년 사업대상지 선정(버스정책과) 및 추진방침 수립  : ’18. 1. 17.

○ ’18년 기술용역 타당성심사(기술심사담당관)	: ’18. 1. 17.

- 실시설계용역에 대한 용역비 산정의 적정성 등 검토

○ ’18년 실시설계용역 계약체결 및 용역시행	: ’18. 1.~5월

○ ’18년 공사, 물품계약 심사(계약심사과)	: ’18. 6월

○ ’18년 공사, 물품 계약체결	: ’18. 7월

○ ’18년 공사시행 및 준공	: ’18. 8.~12월

※ ’17년 공사시행(30개소) : ’18. 3.~6월

붙임 : 1. 무장애정류소 설치현황

2. ’18년 사업대상지(22개소)

3. ’18년 추가대상지(45개소).  끝.

붙임 1		무장애정류소 설치현황

○ 무장애정류소 설치(’15~’17)

연번	사업 연도	정류소ID	정류소명	승차대 타입	자치구별 대상(개소)
1	2015	15-218	신한은행	A2	양천구(2)
2	2015	15-126	목동성원아파트	A2
3	2015	19-112	경방타임스퀘어	B3	영등포(2)
4	2015	19-110	경방타임스퀘어	B3
5	2015	14-197	성서중학교	B3	마포(1)
6	2015	03-277	보광동신동아아파트	B3	용산(2)
7	2015	03-238	대한노인회	A2
8	2015	06-195	청솔우성아파트	A2	동대문(2)
9	2015	06-356	삼성쉐르빌아파트	역B3
10	2015	25-264	명일여자고등학교	B3	강동(1)
11	2015	21-182	쑥고개시장	역B3	관악(7)
12	2015	21-183	영락고교	역B3
13	2015	21-184	청룡시장	B3
14	2015	21-185	관악구청	역B3
15	2015	21-186	청룡시장	역B3
16	2015	21-187	영락고교	B3
17	2015	21-188	쑥고개시장	역B3
18	2015	01-117	경복궁	디자인
19	2015	01-294	안국역.종로경찰서.인사동	디자인
20	2016	01-222	통신대	B3	종로(2)
21	2016	01-199	창덕궁	B3
22	2016	02-148	남산3호터널	B3	중구(1)
23	2016	03-273	서빙고동주민센터	B3	용산(2)
24	2016	03-150	용산한신아파트(해방촌방면)	B3
25	2016	04-130	한양대정문앞	B3	성동(2)
26	2016	04-180	성동구민종합체육센타	B3
27	2016	05-146	광진경찰서	B3	광진(2)
28	2016	05-247	화양시장앞	B3
29	2016	06-205	동대문중학교	역B3	동대문(3)
30	2016	06-308	한국산업인력공단서울지역본부	역B3
31	2016	06-154	하나은행장안동지점	B3
32	2016	07-453	우디안아파트220동앞	B2	중랑(2)
33	2016	07-458	중랑경찰서후문.우디안101동앞	B3

연번	사업 연도	정류소ID	정류소명	승차대 타입		자치구별 대상(개소)
34	2016	08-119	숭덕초교	B3		성북(3)
35	2016	08-151	종암경찰서	B3
36	2016	08-133	월곡역	B3
37	2016	10-120	함석헌기념관.정의여중고	B3		도봉(1)
38	2016	11-251	노원구청	B3		노원(2)
39	2016	11-186	도봉면허시험장	B3
40	2016	15-298	국립과학수사연구소입구	역B3		양천(2)
41	2016	15-217	신한은행신월동지점	B3
42	2016	16-213	우장산역	B3		강서(2)
43	2016	16-230	가양2단지성지아파트.동양고	B3
44	2016	17-144	구로역,AK플라자	역B3		구로(2)
45	2016	17-172	오류동역	B3
46	2016	18-114	금천패션아울렛사거리,W몰	B3, 역B3		금천(1)
47	2016	19-133	국회의사당역	재용		영등포(2)
48	2016	19-132	국회의사당역.국민은행	재용
49	2016	20-217	보라매병원	B-3		동작(2)
50	2016	20-119	사육신공원	B-3
51	2016	21-201	은천초등학교	역B-3		관악(2)
52	2016	21-376	서울대입구(정문)	B-3
53	2016	22-277	우면코오롱아파트	B-3		서초(2)
54	2016	22-398	서초포레스타입구	B-3
55	2016	23-389	삼성서울병원후문	B-3		강남(2)
56	2016	23-450	시립수서청소년수련관	B-3
57	2016	24-169	송파구민회관.구의회	B-3		송파(1)
58	2016	25-339	강일리버파크9단지후문	역B-3		강동(2)
59	2016	25-317	강일리버파크6단지	역B-3
60	2016	01-118	KT광화문지사	디자인
61	2016	01-219	통신대.이화장	디자인
62	2016	05-251	어린이대공원앞.세종대학교	디자인
63	2016	18-115	금천패션아울렛사거리.현대아울렛	디자인
64	2016	23-294	뱅뱅사거리.기쁨병원	디자인
65	2017	01-128	사직단	B2	종로(2)
66	2017	01-224	창경궁	B2
67	2017	02-199	약수역1번출구	B2	중구(1)
68	2017	03-319	순천향병원입구	B2	용산(1)
69	2017	04-210	성수2가3동주민센터	B3	성동(1)
70	2017	05-154	구의사거리	B2	광진(1)

연번	사업 연도	정류소ID	정류소명	승차대 타입	자치구별 대상(개소)
71	2017	06-212	장안2동주민센터	B3	동대문(1)
72	2017	07-149	KT중랑지점	B2	중랑(1)
73	2017	08-209	돌곶이역	B2	성북(1)
74	2017	11-433	대진고등학교	B2	노원(2)
75	2017	11-440	동천학교	B3
76	2017	12-106	연신내역	B2	은평(1)
77	2017	13-118	이대부중	B2	서대문(1)
78	2017	14-101	마포구청.성산자동차검사소	재용	마포(1)
79	2017	15-321	신정숲속마을아파트앞	B3	양천(1)
80	2017	16-232	가양동천주교.영등포공업고등학교	B2	강서(2)
81	2017	16-234	탑산초등학교 허준박물관	재용
82	2017	17-208	대원주유소.국민은행	B3	구로(1)
83	2017	18-202	독산3치안센터	B3	금천(1)
84	2017	19-324	우성5차아파트	B3	영등포(1)
85	2017	20-253	사당역9번출구앞	B2	동작(1)
86	2017	21-181	쑥고개	B3	관악(2)
87	2017	21-108	신림사거리,신림역	B3
88	2017	23-193	봉은사역5번출구.광동한방병원	B2	강남(2)
89	2017	23-269	차병원	B2
90	2017	24-150	영동일고트리지움아파트앞	B2	송파(3)
91	2017	24-161	잠실우성4차현대아파트	B3
92	2017	24-496	송파푸르지오시티.한화오벨리스크	B2
93	2017	25-319	강일동주민센터	B3	강동(2)
94	2017	25-372	아남대우아파트	B2

※ ’17년 무장애정류소(30개소)는 ’18. 3.~6월 설치 예정임

붙임 2		’18년 사업대상지

연번	정류소ID	정류소명	특이점	보도폭	BIT 설치여부	기존 승차대	노선 수	이용수요 (승/하)	우선 순위
1	01-202	조계사	위치 이동, 환기구 옆 큰나무라인과 환기구 끝라인 앞 10~20cm에 맞춰서 공간에 설치, 가로수 1주 제거검토		1		6	237/277	1
2	02-102	손기정체육공원	자전거 거치대 측으로 최대한 붙여서	4.0	1		7	739/761	1
3	02-165	을지로5가	인도10계명-기설 승차대 정비						보도환경 개선과
4	03-213	한남동	기존 쉘터 철거, 12m구간 보도확장,셔틀버스 표지판1m 이격 알뜰BIT설치	4.2		1	4	1210/619	1
5	04-290	신당현대아파트	방음벽 설치, 띠녹지	3.0			2	212/585	1
6	05-149	구의역2번출구	유도블럭 유의	3.8	1		5	711/162	1
7	06-140	서울준법지원센터.동성빌라	일반정류소로 설치(경계석교체X), 뒷편 옹벽에 밀착해서 설치	3.0			3	16076/13546	1
8	07-466	늘푸른근린공원	게시판에 최대한 근접, 뒷담장쪽 후퇴형 설치, 기존승차대(도봉구재산) 타 장소 이설 가능 확인	4.0			5	215/215	1
9	08-184	보문동주민센터	설치지점 하수맨홀 위치, 악취민원우려, 역상형 설치 검토	4.0			4	613/626	1
10	10-193	신한은행방학지점		3~3.5			6	944/293	1
11	11-185	도봉면허시험장	화단	5.6	1	1	16	1247/1044	1
12	12-268	시립은평병원		3.8	1		2	150/500	1
13	14-199	성산2교	정류소 뒤편으로 화단 조성, 일부 복개도로	2.0			9	540/653	1
14	15-321	신정숲속마을아파트	방음벽	3.0			3	300/250	1
15	17-201	구로우체국.이펜하우스5단지후문		3.6			2	103/27	1
16	18-208	국민연금관리공단앞		3.0			2	544/811	1
17	19-324	우성5차아파트		6.0	1		4	468/403	1
18	20-253	사당역9번출구앞		7.5			5	2049/1928	1
19	21-120	KT관악지점		6.0	1		13	1530/1640	1
20	22-372	형촌마을입구	녹지대	2.7			1	123/123	1
21	23-322	원불교앞		3.4			6	671/73	1
22	25-340	강일리버파크9단지후문	후방 띠녹지	2.8			4	981/61	1

붙임 3		’18년 추가대상지

연번	정류소ID	정류소명	특이점	보도폭	BIT 설치여부	기존 승차대	노선 수	이용수요 (승/하)	우선 순위
1	01-127	서울지방경찰청.경복궁역			1		10	179/246	2
2	02-145	남대문시장.회현역	건물 출입부 제외 L=6.0m여유	4.5	1		12	2535/1571	2
3	03-244	도원삼성래미안아파트	기존쉘터철거, 전주철거, 수목이식	4.8		1	2	348/102	2
4	03-198	서울역		5.4			2	540/241	3
5	04-304	왕십리도선동주민센터	띠녹지	4.0			1	66/69	2
6	04-273	숭신초등학교	경사 급함, 띠녹지	6.0			1	27/70	3
7	05-226	화양리	일반정류소로 설치(경계석교체X), 의자추가, 보도뒷편 공지에 기초설치	4.4	1	1	7	869/641	2
8	06-210	배봉초등학교앞	기존의자 존치, 옆에 설치, 휀스1경간 철거, 수목1주 이식	2.7			5	40918/18334	2
9	06-255	이문동현대아파트앞	출입구 피하되 최대한 라인 맞춰서 쉘터설치, 전화부스 셔틀버스표지판 쪽으로 이설, 보도평탄작업, 장애인블럭 연결주의, 차도 정차면 도색 2면 신설	3.0			6	8508/14076	3
10	06-254	이문동현대아파트앞	여건 불리로 10-134 폐쇄 후 10-815 로 통합, 기존승차대(도봉구재산) 타장소 이설 가능여부 확인	3.0			6	12980/8756	4
11	07-433	서울의료원후문		3.0			7	318/318	2
12	07-379	묵동명사약국	기존 정류장2개소 통합이전, 기존보도 후퇴, 버스정차대 조성	4.2			1	76/76	3
13	07-449	신내데시앙아파트	기존 폐식수대 철거(뿌리제근), 안내판 기준 2m이격 표지판설치, 1m이격 쉘터 설치, 가로수1주 이식	2.5			9	250/250	4
14	07-299	새우개마을		3.4		1	8	83/83	5
15	08-409	북한산보국문역1번출구	가로수에서 8m지점 표지판설치. 2m이격 쉘터 설치, 가스관주의, 광고판X	4.5			6	1164/483	2
16	08-264	정릉입구	화단에 붙여서, 고가 유입 노선을 위한 유도유색포장 설치 검토	6.0			3	299/465	3
17	08-408	북한산보국문역2번출구	위치 이동, 시설물 재사용, 장애인블록 연결	4.0			6	429/876	4
18	08-263	정릉입구	화단 꺾이는 부분과 표지판 사이에 설치	3.0			3	529/257	5
19	10-206	방학동우성아파트	기존정류소 철거, 보도확장(연장15m) 정류소 이전설치, 자전거도로 우회	3.0			3	423/51	2
20	10-218	북서울교회		3.0			9	170/527	3
21	11-373	중계역		4.8		1	11	745/796	2
22	11-252	노원구청		3.7	1	1	5	789/1045	3
23	12-205	구산역4번출구		4.0			4	400/700	2

연번	정류소ID	정류소명	특이점	보도폭	BIT 설치여부	기존 승차대	노선 수	이용수요 (승/하)	우선 순위
24	14-144	신덕성결교회		2.0			5	270/280	2
25	14-103	마포농수산물시장.월드컵경기장		4.0	1	1	12	816/463	3
26	14-293	마포아트센터.서강대학교후문		1.5			4	987/255	4
27	15-175	목동14단지상가		2.3			1	150/150	2
28	15-191	목동14당지관리사무소앞		2.3			1	150/150	3
29	15-225	신트리사거리		3.0			4	350/100	4
30	15-341	가로공원공영주차장		4.0			3	200/150	5
31	15-358	양서중학교		7.0			1	250/250	6
32	17-834	신도림역		7.3			1	106/473	2
33	17-174	신오류주유소		5.0	1	1	12	649/821	3
34	18-215	가산디지털단지역입구		3.0			2	202/118	2
35	19-269	대림동우성아파트		5.7	1	1	4	799/758	2
36	20-117	사육신공원		4.5			3	1854/1989	2
37	21-118	KT&G관악지점		6.0	1		13	980/1320	2
38	22-225	이수교		1.6			8	1583/1179	2
39	22-367	염곡동구룡사		5			6	214/21	3
40	23-437	세곡푸르지오	방음벽 설치	3.6			7	356/121	2
41	23-407	궁마을	뒷편 녹지대	1.4			12	338/521	3
42	24-187	가락시영아파트		2.6			3	698/492	2
43	24-105	풍납1동동아한가람아파트	뒷편 화단	2.6			1	387/182	3
44	25-321	강일리버파크2단지.4단지	후방 띠녹지	2.5	1		5	605/9	2
45	25-245	동명약국앞		2.8	1		4	498/395	3