문서번호	물재생계획과-767
결재일자	2018.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하수계획팀장	물재생계획과장
김상훈		김준형	01/18 하상문
협 조

「2018년도」

강남역 일대 침수해소사업 예산배정 계획

2018. 1

물재생계획과

강남역 일대 침수해소사업 예산배정 계획

강남역 일대 침수해소사업을 위하여 편성된 2018년도 예산에 대하여, 사업별 적정한 예산을 신속 배정하여 원활한 사업추진을 도모하고자 함

☐ 사업개요

❍ 사업명 : 강남역일대 침수해소사업(유역경계조정)

❍ 사업규모 : 87.1 ha

❍ 사업예산 : ‘18년 8,000백만원(총34,000백만원)

- 유역경계조정(7,200백만원), 서운로 기본 및 실시설계용역(800백만원)

☐ 추진현황

❍ 유역경계조정 공사

(단위 : 백만원)

연도별	사업개요(a)	사업비	집행액	비고
합계	87.1ha	34,000	4,347
2016년	21.8ha	4,000	3,451	1,2,3차분
2017년	37.8ha	8,000	896	4차분 장기계속공사
2018년		8,000	-
향후	27.5ha	14,000	-	2020년완료

※ 2017년 예산은  집행잔액을 사고이월 없이 약 7,104백만원 불용처리함

❍ 서운로 저지·고지수로 기본 및 실시설계용역

- 용역기간 : 2017.12.15. ~ 2018.10.10

- 용역비 : 718백만원

☐ 2018년 예산배정 검토

❍ 사업추진 방향

- 2017년 발주된 유역경계조정공사(4차분)와 서운로 설계용역 소요예산 반영

※ 유역경계조정공사(4차분) 예산 부족분(도급비, 관급비, 이전비)은 추경 등반영추진

❍ 예산 배정(안)

- 예산 총액 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	유역경계조정	서운로 기본 및 실시설계	기타 사업	비고
합 계		8,000	7,200	718	82
배정 부서	서초구	3,682	3,600	-	82
	강남구	3,600	3,600	-	-
	물재생계획과	718	-	718	-

※ 기타사업 : 서운로 기본 및 실시설계(‘18.10월 준공예정)에 따른 후속 공사비로 배정

- 배정시기

· 유역경계조정공사비 : 1월

· 기본 및 실시설계용역비 : 1월

· 기타 사업비 : 용역진행결과에 따라 ‘18.10월 배정

☐ 조치계획

❍ 상기 배정안에 따라 조기 예산을 재배정하여 원활한 사업추진을 도모하고자 함