문서번호	조경과-786
결재일자	2018.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장	푸른도시국장
현호재	석승우	문길동	01/19 최윤종

2018년 물을 이용한 친수공간 조성사업 추진계획

2018. 1

푸 른 도 시 국

( 조 경 과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2018년 물을 이용한 친수공간 조성사업 추진계획

주요 가로변에 바닥분수, 벽천, 계류 등 수경시설을 설치 및 보수정비하여 시민들이 쾌적한 휴식장소로 이용할 수 있는 청량한 가로공간을 조성하고자 함.

□ 추진방향

○ 휴게시설, 조명 설치 등으로 사계절 이용이 가능한 친수공간 조성

○ 노후 수경시설 재정비로 청량한 가로경관 조성 및 시민안전 확보

○ 수경시설 가동기간을 고려하여 조기 착공 및 준공 추진

□ 사업개요

○ 대 상 지 : 지하철역, 광장 등 주요 가로변(시유지)

○ 사업내용 : 수경시설 설치 및 휴게공간 조성, 노후시설 정비

○ 사업기간 : 2001년 ~ 2019년(계속)

○ 총사업비 : 44,956백만원 (‘17년 이전 42,886, ‘18년  1,965 , ‘19년 이후 95)

< 추진실적 >

▸ ’01 ~ ’17년, (신규)조성 49개소, (보수)정비 25개소

구 분		계	2015년 이전	2016년	2017년	비 고
개소수	조성	49	48	-	1
	정비	25	8	13	4
조성면적(㎡)		140,463	139,863	-	600
사업비(백만원)		42,886	40,241	1,290	1,355

중랑구 사가정역 마을마당 계류 정비	성북구 종암로 물의거리 정비	강동구 88수림대 가로공원 정비

□ 2018년 추진계획

○  대 상 지 : 용산구 원효로4가 113-59 원효대교 북단 녹지대 등 7개소

○  규    모 : 8,400㎡(신규조성 897㎡, 보수정비 7,503㎡)

○  사업기간 : 2018. 1. ~ 9.

○  사업내용 : 수경시설 설치 및 휴게공간 조성, 노후시설 정비 등

○  추진기관 : 용산구 등 6개구

○  사 업 비 : 1,965백만원(시설비 1,960, 시설부대비 5)

- 예산과목 : 푸른도시국 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 물을 이용한 친수공간 조성, 시설비 및 시설부대비(401-01)

○  추진일정

- 2018. 1.       : 사업계획 수립 및 시달, 기술용역타당성 심사

- 2018. 2. ~ 3. : 주민의견수렴, 실시설계용역 시행

- 2018. 4. ~ 5. : 설계심의, 계약심사 등

- 2018. 6. ~ 9. : 공사시행

□ 행정사항

○ 기술용역타당성 심사결과에 따른 설계용역비 재배정

- 지역주민 및 시의원 등 관계자 의견을 충분히 수렴하여 설계안 작성

○ 설계심의(조경과), 계약(원가)심사 결과에 따라 공사비 재배정

- 설계심의 요구 시, 시의회 소통결과 작성 필수

- 사업규모, 설계난이도 등을 고려 설계자문(자체, 내부, 외부) 실시

○ 착·준공 시 5일 이내 보고 철저(준공보고 시 관리대장 제출)

- 설계심의 지적사항이 공사에 적극 반영될 수 있도록 추진 철저

붙임 : 1. 2018년 사업대상지 1부.

2. 설계심의요구(서식) 1부.

3. 착(준)공보고(서식) 1부.

4. 2017년 사업추진 실적 1부.  끝.