투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 변경계약 의뢰(종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사)

종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사 관련하여 아래와 같이 준공기한 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명 : 신호등주 제작구매(종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사)

2. 계 약 자 : 대현산업기술㈜  대표자 윤영근

3. 계약금액 : 금823,416,000원

4. 착 공 일 : 2017.09.15.

5. 변경내용

구 분	준공기한			연기사유
	당초	변경	증·감
종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사	2018. 2.28	2018. 4.30	증)61일	시민불편 해소 및 토목공종과 연계시공(귀책사유 : 발주처)

붙임  (1) 합의서 1부.

(2) 방침서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	진종구		녹색성장과장	오삼록		설비부장	01/19 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-745	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8636	/전송	3708-8659	/	jin0652@seoul.go.kr	/	대시민공개