문서번호	급수운영과-1434
결재일자	2018.1.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김대용		01/23 장종욱
협 조

설계변경(2차) 심의 위원회 개최결과 보고

(2017년 도봉, 노원구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

2018. 1.

북부수도사업소

(급수운영과)

설계변경(2차) 심의위원회 개최결과 보고

우리 사업소에서 시행중인 「2017년 도봉, 노원구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」와 관련하여 신규공종 및 계약물량 증감에 따른 변경 사유가 발생함에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

1. 설계변경 개요

○ 공 사 명 : 2017년 도봉, 노원구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

○ 도 급 자 : 라택씨앤씨(주) 대표 박기춘

○ 공사개요

- 당초 : 노후밸브 교체 114개소, 원형 및 중형변실 정비 171개소

철개교체, 굴상 및 굴하 123개소, 기타 시설물보수 및 환경정비 1식

- 변경 : 노후밸브 교체 120개소, 원형 및 중형변실 정비 33개소

철개교체, 굴상 및 굴하 19개소, 기타 시설물보수 및 환경정비 1식

○ 계약기간 : 2017. 7. 10 ～ 2018. 5. 31

○ 도 급 액 : 변경없음

구 분	금 액 (원)		증ㆍ감 (원)	비 고
	당 초	변 경
**********	***********	***********	-	신규공종 및 물량 증·감 발생
***********	***********	***********	-
*********	***********	***********	-

○ 설계변경 내용

- 신규공종 : 아스팔트 포장절단(100~150mm 야간+지세)외 84개 공종

- 물량증가 : 잔토처리외 107개 공종

- 물량감소 : 원형밸브실 설치공(기초CON)외 19개 공종

2. 심 의 개 최

○ 심의일시 : 2018년 1월 23일(화) 16:30

○ 심의장소 : 우리사업소 4층 회의실

○ 심의위원 : 위원장 급수운영과장

위  원 급수운영과(시설7급 윤승구, 시설7급 김재영)

시설관리과(시설6급 이문성, 시설7급 이한수)

3. 심 의 내 용

○ 계약물량 감소에 대한 설계변경 사항으로

가. 물량변동의 적정성 여부

나. 관련규정 및 적법성 여부

다. 설계변경 세부내용 및 사유 등

4. 심 의 결 과

○ 물량변동의 적정성 여부 : 적 정

○ 관련규정 및 적법성 여부 : 적 정

○ 설계변경 세부내용 및 사유 : 적 정

첨 부 : 가. 변경내역서 및 설계변경 사유서 각 1부.

나. 심의 의견서 1부. 끝.