문서번호	급수운영과-1890
결재일자	2018.1.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		동부수도사업소장
이훈재	권기섭	송근호		01/23 이구석
협 조
	시설관리과장		최명익
	주무관		노운학

2018년 노후 배급수관 정비사업 추진계획

2018. 1.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2018년 노후 배급수관 정비사업 추진계획

연차별 노후 배급수관 정비계획에 따라 누수․녹물이 예상되는 상수도관을 정비하여 깨끗한 수질유지 및 누수방지를 통한 안정적인 급수체계 구축하고자 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		사 업 개 요

□ 관련근거

○ ’18년 배급수관 정비사업 대상 선정 및 심사계획(누수방지과-11199호, ’17.11.29)

○ ’18년 배급수관 정비공사 사업계획 심사결과 보고 (누수방지과-12109, ’17.12.28)

□ 추진방향

○ 녹물 및 누수발생이 많은 취약지역, 소출수 지역 블록단위 집중 정비

○ 비내식성 배급수관은 내식성관으로 교체(분기점 원천철거･폐쇄)

< 배급수관 >				< 급수관 >
	⇨				⇨
無라이닝 주철관		에폭시 라이닝 주철관		아연도강관		스테인리스강관

□ 정비목표 : 9.5km (사업비 7,600백만원)

□ 배급수관 정비계획(총괄)

(단위:m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업(90%이상)			연간단가(10%이내)
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계	9,500	7,600	6	8,698	7,000	802	600
광진구	769	614	-	680	554	89	60
성동구	2,206	1,756	2	2,020	1,626	186	130
동대문구	6,201	4,970	4	5,998	4,820	203	150
중랑구	324	260	-	-	-	324	260

□ 단위사업 발주계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 6건		100～300	8,698	7,000
1	성수동2가 230~231-1 외 6개소 배급수관 정비공사	150~200	1,300	1,060	급수운영과 (광진구 680m)
2	마장동 444-14~450-6 외 3개소 배급수관 정비공사	100~300	1,400	1,120	급수운영과
3	용두동 222-2~233-26번지 외 7개소 배급수관 정비공사	150~300	1,556	1,250	시설관리과
4	청량리동 산4-1~회기동 60-108번지 외 5개소 배급수관 정비공사	150~300	1,453	1,160	시설관리과
5	전농동 103-287~126-68번지 외 5개소 배급수관 정비공사	150~300	1,493	1,210	시설관리과
6	장안동 92-12~92-17번지 외 10개소 배급수관 정비공사	100~300	1,496	1,200	시설관리과

Ⅱ		추 진 계 획

□ ’18년 사업계획 심사 결과 조치사항

연번	공사명	사업개요			조치사항
		블록명	구경	연장
1	성수동2가 230 ～231-1외 6개소 배급수관 정비공사	소 계	150 ～ 200	1,300
		①구간 아차산 55B/L	200	170	○ 계획관경 D=150mm ⇒ D=200mm 변경 ⇒ 설계 반영(D=200mm)
2	마장동 444-14 ～450-6외 3개소 배급수관 정비공사	소 계	100 ～ 300	1,400
		②구간 대현산 58B/L	200	280	○ 금호동4가 금호아파트 앞 단절관 순환배관 연결 ⇒ 도로 폭 협소(일부 암 구간), 금호 아파트 인입급수관 D200 연결 시행
		③구간 대현산 74B/L	300	230	○ 계획관경 D=300mm ⇒ D=200mm 변경 ⇒ 행당6구역 급수협의 D=300mm 인입에 따른 당초 D=300mm 부설(붙임 참조)

연번	공사명	사업개요			조치사항
		블록명	구경	연장
3	용두동 222-2 ～ 233-26번지 외 7개소 배급수관 정비공사	소 계	150 ～ 300	1,556
		⑧구간 용마 13B/L	200	230	○ 계획관경 D=300mm ⇒ D=200mm 변경 ⇒ 설계 반영(D=200mm)
4	청량리동 산4-1 ～ 회기동60-108 외 5개소 배급수관 정비공사	소 계	150 ～ 300	1,453	○ 원안 시행
5	전농동 103-287 ～ 103-377 외 5개소 배급수관 정비공사	소 계	200 ～ 300	1,493
		⑥구간 용마 35B/L	300	123	○ 기존 2열배관(100mm*1열, 200*1열)은 금회 개량대상 200mm를 300mm로 확대하고 기존 100mm는 폐쇄조치 후 1열로 통합 ⇒ 설계 반영(D200 ⇒ 300mm, 기존 100mm 폐쇄)
6	장안동 92-12 ～ 92-17 외 11개소 배급수관 정비공사	소 계	150 ～ 300	1,496	○ 원안 시행

□ 추진일정

도면심사	⇒	일위대가	⇒	계약심사	⇒	공사발주	⇒	계약및착공	⇒	준 공
(’18.01)		(’18.02)		(’18.02)		(’18.03)		(’18.3~4)		(’18.11)

○ 1. 17.(수) ----- 상수도 공사 감독자 지정(서울시설공단 공사감독2처)

3명(정민화, 손성국, 강현성) 설계 참여

○ 1. 23.(화) ----- 배급수관 정비사업 설계도면 심사(본부 누수방지과)

심사결과에 따라 설계서 작성 후 계약심사 의뢰

○ 2. 6. ~ 2. 9. ----- 상수도공사 공통 일위대가 작성(품 산정, 운반거리 산출)

본부(재무회계과) 기본 일위대가 통보 ⇒ 사업소 공통 대가 수정

○ 2월 ~ 3월초 ----- 계약심사 의뢰(토목공사 5억원 이상 본청 계약심사과)

공사 5억원 미만 및 한시적 제외 대상은 본부 재무회계과 의뢰

□ 중점 추진사항

○ 철저한 현장조사 및 선제적 기술검토 실시

- 횡단굴착 등을 통해 지하매설물에 대해 세밀한 현장조사 실시

- 설계단계 부터 공법변경 등 예측 불가능한 상황에 대비한 기술검토   실시(필요시 본청 및 본부 기술검토 협의)

○ 공사시행 전후 필요한 선행절차 이행 철저

- 현장여건에 부합된 설계내역 작성으로 계약심사 보완 최소화 및 심사   지연 방지

- 도로굴착 승인, 교통소통대책 용역 발주 및 유기관기관 협의 등 병행 추진

○ 공사 예정지역의 잠재적 민원 사전 예측 및 해결방안 마련

- 녹물출수, 야간공사 예정지역에 대해 공사 초기단계 부터 안내문 부착,    홈페이지 공지 등을 통한 충분한 홍보 실시

Ⅲ		행 정 사 항

○ 추진실적 보고 : 매월 7일 이내, 본부 누수방지과

○ 교통소통대책수립용역 발주 : ’18. 2월

- 도로 1개 차로이상 점용, 점용기간 20일 초과(서울특별시 도로점용   공사장 교통소통대책에 관한 조례 제3조)

붙임 : 1. ’18년 노후 배급수관 정비사업 추진계획서 1부.

2. 노후관 현황 및 연차별 정비계획 1부.  끝.