문서번호	한양도성도감-766
결재일자	2018.1.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬		곽동진	01/24 진용득
협조

업무협의(중부공원녹지사업소) 결과보고

(남산회현자락 한양도성 현장 유적박물관 실시설계)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 1.

문 화 본 부

(한양도성도감)

-남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관-

중부공원녹지사업소 협의 결과보고

	회의개요
○ 일 시 : 2018.1.19.(금) 10:00 ~ 12:00 ○ 장 소 : 중부공원녹지사업소 ○ 참석자 : 중부공원녹지사업소장, 시설과장, 조경팀장, 한양도성도감 도성관리팀장외 1인, 용역업체 소장외 6인

Ⅰ		회의목적

○「남산회현자락 한양도성 현장유적박물관」실시설계 계획(안) 보고 및 시설물(보호각, 안내센터, 화장실) 설치 등에 따른 업무협의

○ 남산1근린공원 조성계획 변경결정에 따른 진행사항

Ⅱ		회의결과

************

○ 공중화장실(’09년 완공)과 주차장(’17년 완공) 일부(18면) 철거는 예산낭비가 우려되고,

보호각은 규모(100m)가 커 축소할 필요는 없는지 공원조성과와 도시공원위원회의 자문을 받아 반영하기 바람

****************

○ 주차장 일부(18면), 화장실 및 기존시설 등의 철거에 따른 매몰비용을 산출하여 제시할 필요가 있음

○ 기존 등산로는 폐쇄가 타당하다고 보이므로 검토후 의견을 회신하겠음

****************

○ 화장실 신설지의 수목(고목 등)은 종류별 수량을 파악하여 도시공원위원회 심의 시 반영 바람

Ⅲ		검토내용 및 처리의견

〈기존 화장실 철거관련〉

○ 지상에 노출된 기존 화장실은 위치를 변경하여 지하화 하는 것이 남산 경관을 위해 더 바람직함(’17.11.29. 회현자락 한양도성 정비사업 전문가 TF회의 자문)

순성로 평지구간과 산지구간 교차점에 위치하여 경관 저해(지상 2층 화장실)	경사지 옹벽 후면의 지하로 화장실을 이전하여 자연경관 개선

〈기존 시설물 철거에 따른 매몰비용과 관련〉

○ 주차장 일부(18면), 화장실 등 기존시설의 철거에 따른 매몰비용과 조경수목의 이설계획을 심의도서에 반영하여 도시공원위원회 심의 시 의견수렴

〈보호각의 규모와 관련〉

○ 보호각 설치관련 추진경위

- ’15.4. / 5.29. : ****************************

⇒ 노출된 유구의 지속적 훼손과 안정성이 우려되므로 인공적인 보호장치 설치 필요

- ’15.6.23. / 8.13. : *******

⇒ 현장 유적박물관 및 보호각은 발굴상태, 보존의미 등을 입체적으로 보여줄 수 있는 선도적 창의력이 발휘되어야 하므로 설계공모를 통해 추진

※ 분수대는 시민들이 애착을 가지고 이용했던 장소이므로 존치하고 배전터는 발굴상태로 보존

- ’16.4.~7. : 현장유적박물관 기본구상 용역

⇒ 보호각 및 탐방로 등 설치 제안

- ‘16.1.8./12.2. : *********************

⇒ 설계공모는 국내외 참여제한이 없는 공개공모 추진

- ‘16.4.~12. : 전문가 TF팀 구성·운영(자문회의 6회)

⇒ 발굴된 회현자락 한양도성 유구는 시기별 축조방식(태조, 세종, 숙종 이후)과 축조기술(영정주공, 뒷채움, 판축 등)을 보여주는 유일한 곳으로 역사문화적 가치가 매우 높음

⇒ 원형을 보존하되 적정 규모의 보호각을 설치하고, 조선신궁 배전터, 분수대 등 근𐤟현대 시설을 포함하여 그 일대를‘현장유적 박물관’으로 조성함이 타당함

- ‘17.1.~4. : 현장유적박물관 국제 설계공모

⇒ 보호각 1,861㎡, 인포센터 및 연구실 147㎡, 화장실 이전 신축 104㎡

- ‘17.6.~12. : 회현자락 한양도성 정비사업 전문가 TF 자문

⇒ 유구에 보호각을 씌우지 않으면 노출된 부분의 훼손 우려가 커 전체(약100m)를 씌우되, 남산공원 경관을 고려하여 최소한의 규모가 타당(판축부는 제외)

○ 보호각 규모 축소검토 의견에 대한 검토

- 전문가 자문, 현장유적박물관 기본구상 용역과 국제 설계공모 결과에 따라 보호각 설치가 검토·계획된 사항이며,

- 회현자락 한양도성 정비사업 전문가 TF 회의를 통해 유구의 보호에 필요한 범위안에서 제한적으로 보호각(약 100m × 20m)을 씌우는 것임

- 따라서, 그 동안의 검토결과를 반영한 공원조성계획 변경(안)으로 중부공원녹지사업소(입안권자)에 입안 요청하고자 함

Ⅳ		향후계획

○ ’18. 1~2월 : 공원조성계획 변경(안) 추가 협의(공원조성과, 중부녹지공원사업소)

(보호각 설치규모와 기존 시설물의 철거 등에 대한 필요성 설명)

○ ’18. 2~4월 : 푸른도시국(공원조성과) 공원조성계획 변경절차 진행

- 중부녹지공원사업소: 공원조성계획 입안 및 열람공고

- 푸른도시국: 사전협의 및 도시공원위원회 심의

○ ’18. 4~6월 : 중부녹지공원사업소 협의 및 진행(실시계획인가 절차 등)

문화재청 실시설계(안) 협의(현상변경허가 절차 등)

용역 최종보고.  끝.