문서번호	공공개발센터-809
결재일자	2018.1.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	개발사업팀장	공공개발센터장	재생정책기획관		도시재생본부장
장수련	신윤철	代오승민	강맹훈		01/24 진희선
협 조

-서부간선도로 일대 유휴부지 활용 기반구상 수립 용역-

준 공 기 한  연 기 보 고

2018. 1

도시재생본부

공공개발센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

서부간선도로 일대 유휴부지 활용 기반구상 수립 용역

준 공 기 한  연 기 보 고

「서부간선도로 일대 유휴부지 활용 기본구상 수립」용역과 관련하여 추가 과업기간 확보가 필요하여 준공기한을 연기하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서부간선도로 일대 유휴부지 활용 기본구상 수립

○ 용역기간 : 2017. 7. 27 ~ 2018. 1. 27 (6개월)

○ 용역범위 : 일반도로화 연장 8.1km, 친환경공간 14.6㎡

- 주요 유휴부지 : 약5만㎡(신정교 등 6개교차로, 일반도로 통폐합 구간)

******************

************************

****************************************

□ 추진경위

○ ‘17. 5. 02 : 용역추진방침서

○ ‘17. 7. 27 : 용역계약

○ ‘17. 8. 21 : 착수보고

******************************************

□ 준공기한 연기

○ 준공기한 변경

- 당초 : 2017. 7. 27 ~ 2018. 1. 27

- 변경 : 2017. 7. 27 ~ 2018. 3. 27 (증59일)

*계약금액 등 기타사항 변경 없음

************

*****************************************

************************************************

□ 행정사항

○ 재무과 용역 준공기한 연기 의뢰 : ‘18. 1월중

□ 향후계획

○ ’18. 1. : 변경계약 체결

○ ’18. 2. ~ 3. : 최종보고 및 용역준공.  끝.