문서번호	건축과-1961
결재일자	2018.1.24.
공개여부	부분공개(5)

주무관	공공건축담당	건축과장		도시환경국장
임성택	이제관	김재열		01/24 유인욱
협 조 자
	행정지원과장		하순호
	후생지원담당		박윤숙

- 성북구 삼척수련원 신축공사 - 설계공모 심사결과 보고
	0

2018. 1.

도시환경국

건  축  과

- 성북구 삼척수련원 신축공사 관련 -

설계공모 심사결과 보고

우리구와 자매결연 체결한 강원도 삼척시에서 매년 한시적(7~8월) 운영 중인 삼척수련원 부지에 창의적이고 예술성을 갖춘 수련원 건립을 위한 설계안을 선정하기 위한 『설계공모 작품심사』결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ				공사개요

위    치 : 강원도 삼척시 근덕면 상맹방리 266-7 외3필지

대지면적 : 4,399㎡(총 부지 5,673㎡ 중 도시계획도로 83㎡, 보전녹지지역 1,191㎡ 제척)

규    모 : 지상3층 이하, 연면적 1,100㎡(±5%)

사업기간 : 2017. 5월 ~ 2017. 11월

건물용도 : 교육연구시설(연수원)

소요예산 : 3,575백만원(공사비 : 3,138백만원, 설계용역비 : 99백만원 등)

Ⅱ				추진경위

설계공모 통지 : 2017. 12. 4.(월)

응모신청서 교부 및 등록 : 2017. 12. 6.(수)～2017. 12. 7.(목)

□ 등록결과 : 11개 업체

질의회신 : 2017. 12. 15.(금)

작품접수 : 2018. 1. 17.(수)

□ 작품접수결과 : 9개 업체

작품심사 : 2018. 1. 23.(화)

Ⅲ				작품 심사개요

일    시 : 2018. 1. 23.(화) 14:00

장    소 : 성북구청 11층 회의실

심사내용 : 심사위원회의 종합평가를 거쳐 “입상작” 선정

심사대상 : 9개 작품

Ⅲ				심사위원회 구성

위원장 : 김재성(홍익대학교/CSDG)

참석위원이 추천하여 위원 일동 제청으로 선출

위원 : 5명

□ 서울시 공공건축가(4명), 성북구 건축심의위원(1명)

심사위원 명단

연번	위원명	성별	소속	비고
1	김재성	남	홍익대학교 / CSDG	서울시 공공건축가
2	홍양표	남	㈜에이오씨 건축사사무소
3	박성현	남	㈜씨드아키텍 건축사사무소
4	김경란	여	크크르크득 건축사사무소
5	오종수	남	㈜앤드 건축사사무소	성북구 건축심의위원

Ⅳ				심사결과

구분	심사번호	업체명	대표자	시상내용
당선작	7	도시건축집단/온아 건축	권웅규	설계권 부여
우수작1	9	명지대학교/에이지건축	김정수	상금800만원
우수작1	8	나우 건축	나경록	상금600만원

심사위원회 의결내용

입상작 조감도

【당 선 작】

【우 수 작 1】

【우 수 작 2】

심사방법 및 기준

□ 작품번호는 추첨으로 심사번호만 부여(제출도서의 익명성 유지)

☞ 입상작 선정 후 입상작에 대하여 업체명 공개

□ 응모작 심사와 관련한 모든 사항을 심사위원장에게 위임

심사위원회에서 공개토론 및 투표에 의하여 심사기준 선정

심사기준 선정결과

□ 1차 심사 : 9개 작품 중 4개작품 탈락 선정

□ 2차 심사 : 5개 작품 중 2개작품 탈락 선정

□ 최종심사 : 3개 작품 중 당선작 및 우수작1,2 선정

(토론으로 순위 결정 합의하여 결정)

Ⅴ				심사결과 발표

□ 작품심사결과(당선작, 우수작1·2) 및 심사위원명단은 성북구청 건축과 홈페이지에 공고하고 당선작 및 입상작은 개별 통보

□ 입상작 선정 및 보상

□ 당선작 : 1점 --- 상장 및 기획․중간․실시 설계권 부여

□ 우수작 : 2점 --- 상장 및 상금 1,400만원

(공모심사 점수 높은 자 순으로 800만원, 600만원)

Ⅵ				향후 추진계획

□ 2018. 02. : 설계용역 계약 및 착수(당선작)

□ 2018. 06. : 설계완료(관련부서 협의, 계약심사 등 병행)

□ 2018. 07. : 공사발주 및 계약

□ 2018. 09. ~ 2019. 06. : 삼척수련원 공사(개관준비 병행)

□ 2019. 07. : 삼척수련원 개장 및 운영(행정지원과)

붙임 :  1. 현상설계 심사위원 참석명단 1부

2. 현상설계 결과 공고문(안) 1부

3. 심사관련서류 1부.  끝.