문서번호	치수과-296
결재일자	2018.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수과장	시설부장		한강사업본부장
김동식	신용철	최진석		01/24 윤영철
협 조

한강 저수로 정비(공사및용역) 추진계획 보고

2018. 01.

한강사업본부

(치수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

한강 저수로 정비(공사및용역) 추진계획 보고

◦ 지천합류부 및 상수원 취수장 주변에 퇴적된 토사를 적기에 제거함으로써 홍수방지 및 한강 하도 안정성 확보.

◦ 한강종합개발사업(’87년) 이후 매년 수심측량을 통해 하상변동 조사 및 수생태 환경을 고려한 하상관리 방안 계획수립.

□ 사업개요

❍ 사업현황

구 분	위 치	사업비 (단위:백만원)	사업기간	사업(과업)내용	비고
계		4,191
저수로 준설 사토반출	지천합류부 등	2,861	‘18.3~’18.11	-준설 및 반출(34,000㎥) 만초천, 안양천, 여의하류, 홍제천, 수상택시 승강장 -임시적치장 반출(93,000㎥)	공사
	취수장(6개)	843	‘18.3~’18.11	-준설 및 반출(20,200㎥) 풍납, 일산, 자양, 성남, 암사, 강북	공사
건설사업관리	한강준설구역	206	‘18.3~’18.11	-준설공사 감리(8개월)	용역
한강 수로조사 및 하상종합관리	한강서울구간 (41.5km)	281	‘18.3~’18.12	-하상변동조사․분석․예측, 수심측량 -준설이 생태에 미치는 영향, -준설이 하천 수질에 미치는 영향	용역

❍ 예산과목 : 4,191백만원 (시비 3,154, 수계관리기금 1,037)

- 깨끗하고안전한한강만들기,한강하천시설관리,한강저수로정비,시설비(시비)

- 깨끗한물관리,한강수질개선,잠실상수원퇴적물준설,시설비(수계관리기금)

□ 추진현황

❍ ‘17.11.08.   : 용역 타당성조사 완료 (기술심사담당관)

❍ ‘18.  1.15.   : 계약심사 완료 (계약심사과)

❍ ‘18.  1.19.   : 계약업무 일상감사 완료 (감사위원회 안전감사담당관)

□ 발주계획(공사1건, 용역 2건)

❍ 한강준설 공사(저수로 정비)

- 공사기간 : 착수일로부터 10개월

- 공 사 비 : 3,704백만원

- 입찰방법 : 일반공개경쟁(지역의무공동도급)

- 입찰참가자격

‣ 전문건설업중 준설공사업 면허를 보유한 업체

‣ 지역의무공동도급(서울시 소재 업체는 단독참여가능, 이외 소재 업체는 의무적으로 서울시 업체(참여비율 49%)와 공동수급체구성), 공동도급(공동이행방식) 구성원수는 5개사 이내 최소지분률 5%이상

❍ 한강준설 공사(저수로 정비) 감독권한대행 건설사업관리용역

- 공사기간 : 착수일로부터 10개월

- 용 역 비 : 205백만원

- 입찰방법 : 일반공개경쟁

- 입찰참가자격

‣ 건설기술진흥법 26조 및 시행령 44조에 의거 건설기술용역업[종합 또는 설계․사업관리(일반 또는 건설사업관리)]로 등록된 업체

❍ 한강 수로조사 및 하상 종합관리 방안수립용역

- 공사기간 : 착수일로부터 12월 31일까지

- 용 역 비 : 287백만원

- 입찰방법 : 일반공개경쟁

- 입찰참가자격

‣ 엔지니어링산업진흥법 제21조 및 시행령 3조 엔지니어링 활동에 의한 건설부문(수자원개발), 환경부문(자연․토양환경)에 대하여 산업통산자원부장관에 신고를 필한 업체

‣ 공간정보의 구축및관리등에 관한 법률 44조 및 동법시행령 34조의 규정에 의한 연안조사측량업을 등록한 업체

※ 연안조사측량업에 대하여는 공동도급(공동이행방식, 분담이행방식)이 가능하며, 구성원수는 5개사 이내 최소지분률 5%이상)

□ 향후계획

❍ ‘18. 1월.        : 공사 및 용역 발주

❍ ‘18. 2월~3월.   : 공사 및 용역 계약 및 착수

❍ ‘18. 3월~11월. : 공사 및 용역 시행

❍ ‘18. 12월.       : 공사 및 용역 완료