문서번호	도로보수과-338
결재일자	2018.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
함창수		이상호	01/25 신상식
협 조
	주무관			유진석

2018년 노후포장도로 정비공사 추진 계획

2018. 1.

2018년 노후포장도로 정비공사 추진 계획

2018년 우리사업소 “노후포장도로 정비공사”로 재배정된 예산에 대한 조기집행 계획을 수립·시행하고자 함

□ 관련근거

○ 2018년 노후포장도로 정비 추진계획 통보 : 도로관리과–896(’17.1.17.)

- 예산 재배정 내용

구 분	***	********	******	*** ****	**********	기타
재배정액	******	*****	*****	***	***

- 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 추진방향

○ 노후포장도로정비공사 시공품질 향상

○ 현장 맟춤형 포장시공 및 관리

○ 공사 조기 발주 및 예산 조기집행 : 상반기 50% 집행 목표

□ 세부 추진계획

《 포장 시공 품질 향상 》

○ 아스팔트 포장 내구성 향상

- 1등급 골재 사용으로 도로 손상 저감

- 교통량이 많은 곳 고내구성 포장으로 공용수명 향상(서울형포장 설계)

○ 서울형 포장설계법 시험포장 확대

- 포장 노후도, 교통량, 노면 지지력, 하부층 손상 여부등을 종합적으로 고려하여 적정 포장단면 산출 및 적용

- 코어 채취결과에 의거 하부층 손상시 하부 기층까지 정비

○ 관리감독 강화

- 시공현장 아스콘공장 용역사(감리)·사업소 합동 점검 실시

- 열화상카메라에 의한 아스팔트포장 다짐온도 관리

《 예산 조기 집행 》

○ 발주 : 2018.1.월중 (계약심사 등 행정절차 사전 이행)

○ 착공 : 2018.3월 (3월까지 실착공)

○ 예산 조기 집행 : 상반기중 50% 이상 (선금 및 기성금 지급 등 조치)

《 노후포장도로 정비공사 발주 계획 》

○ 대상 :  용마산로외 17개 노선

○ 효율적인 공사 추진을 위하여 공사 및 2개 권역으로 분리 발주

- 1구역 : 9개노선(독서당로,마장로,광나루로,왕십리로,고산자로,한천로, 시립대로,전농로,왕산로)

- 2구역 : 8개노선(용마산로,아차산로,면목로,천호대로,구천면로,동일로,자양로,능동로)

※ 폐아스콘 처리 용역 및 차선도색공사 포함하여 분리 발주

○ 예산배분 및 세부 추진 일정

(백만원)

공 사 명	***	****	****	****	***	비고
합 계	******
노후포장도로정비공사-1구역	*****	****	****	*********	***	자재비 및 폐아스콘 처리 포함
노후포장도로정비공사-2구역	*****	****	****	*********	***
긴급복구공사	*****	****	****	*********	***
불량맨홀 정비공사	***	****	****	*********	***
예방적유지보수공사	***	****	****	*********	***
차선도색공사-1구역	***	****	****	*********	***	자재비 포함
차선도색공사-2구역	***	****	****	*********	***

※ 노후포장도로정비공사 포장단면 : 코어채취후 결과 반영

※ 관급자재 구매 및 폐아스콘 처리용역은 본공사와 동일 시기에 발주

□ 향후계획

○ 2018. 1  : 공사 발주 완료(계약심사 등 행정절차 사전이행)

○ 2018. 3  : 공사 착공

○ 2018. 12 : 공사 준공. 끝.