함께해요 을지연습!, 튼튼해요 국가안보!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	시립구로청소년수련관 실내수영장 개보수공사 계약 변경 의뢰(1차)

1. 청소년정책과-1644호(2018.1.24.)호와 관련입니다.

2. 시립구로청소년수련관 실내수영장 개보수공사와 관련하여 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경 계약 내용

구분	당 초	변 경	변경 사유
용역기간	********** ************************	*********** ************************	구로수련관 발주공사 및 市발주공사 병행시행으로 인한 지연 선행공정(구로수련관 발주공사) 완료 후 후속공정(市발주공사)시행 가능

붙 임 :  1. 계약 변경 계획서(1차) 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.

4. 변경계약서 및 공정표 1부. 끝.

	청소년정책과장
★주무관	정한수		청소년시설팀장	최희곤		청소년정책과장	01/25 이창석
협조자
시행	청소년정책과-1702	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4123	/전송	02-2133-1430	/	architect8389@seoul.go.kr	/	부분공개(5)