		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전 (937정거장 환기구 규모조정 및 #1출입구 이동에 따른 실정보고 승인 통보(922공구))

1.업무지시현장 :  서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(T/K) 주식회사 선진엔지니어링종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2018-01-26 13:01:50

3.지 시 내 용:

가. 지감922-18-042(2018.01.22.)호 및 지감922-18-043(2018.01.23.)호와 관련입니다.

나.「서울지하철9호선3단계 922공구 건설공사」의 937정거장 환기구 위치이동과 규모조정 및 #1출입구 및 환기구 등 둔촌재건축부지로 평행이동에 따른 실정보고 사항에 대하여 귀 감리단의 검토의견과 같이 승인하며,

다. 향후 상기건에 대해 본부 설계변경자문위원회를 개최하고자 하니, 관련 서류를 조속히 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 실정보고 검토보고서 2부.  끝.

주무관							안태현			주무관					유원하					토목2과장					01/26 방영복
협조자
시행			도시철도토목부-1122									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스 9층															/
전화								/전송			02)772-7306					/													/	부분공개(5)