투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	봉제박물관 건립공사 건축 감리용역 용역기간 연장계약 정정 의뢰

우리 본부에서 시행중인 「봉제박물관 건립공사 건축 감리용역」 에 대하여 아래와 같이 공사기간연장 계약요청(정정)하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 봉제박물관 건립공사 건축 감리용역

나. 용역기간 : 총차  - 2016.12. 5 ~ 2018. 1. 28

2차  - 2017. 2. 3 ~ 2018. 1. 28

다. 계약금액 : 총차 – 64,309,700원

2차  - 46,309,700원

라. 계 약 자 : ㈜시엔디건축사사무소 설정훈

마. 계약변경 내용

구 분	변 경 전		변 경 후	비 고
용역기간	총차	2016. 12. 5 ~ 2018. 1. 28	2016.12. 5~ 2018.2.26	30일 연장
	2차	2017. 2. 3 ~ 2018. 1. 28	2017.02. 3~ 2018.2.26	30일 연장
계약금액	총차	64,309,700원	변경없음
	2차	46,309,700원	변경없음

붙임 : 1) 검토 보고서 1부.

2) 준공기한연기의뢰서 1부. 끝.

	건축부장
주무관	이원기		환경시설과장	유현수		건축부장	01/26 임인구
협조자
시행	건축부-1232	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)